				★ ◎
문서번호	기반시설부-654			부 원			부원			기반시설부장			도시조성처장
보존기간	5년														04/19
				서영훈			김동열			노병철			나용환
결재일자	2022.04.19
공개여부	비공개(5)			협조
일상감사	대상아님
보조제목을 입력하는곳 입니다
제3차 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토(내곡 지구외도로 건설사업관리용역)
		서울주택도시공사
( 도시공간조성처 기반시설부 )

물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토

「서울내곡 공공주택지구 지구외도로 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」과 관련하여, 물가변동으로 인한 계약금액 조정사항(3차)을 검토 보고 드림.

감리용역 개요

용역명 : 서울내곡 공공주택지구 지구외 도로 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

감리사 : ㈜신명건설기술공사 외 2개사

용역기간 : 2019년3월20일 ~ 2023년10월4일

용역금액 : 1,303,900천원

관련근거

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제73조 제①항에 의거하여 계약을 체결한 날부터 90일 이상 경과기간 충족

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제73조 제①항에 1에 의거하여 입찰일(직전 조정기준일)을 기준으로 하여 품목조정률을 100분의 3이상 충족

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행규칙 제72조에 의거하여 품목조정률 적용

제3차 물가변동 조정 검토 (2020년1월1일 기준)

- 주요 검토내용

물가변동 경과기간 : 365일 경과

‣ 기준시점(직전조정기준일) : 2021년1월1일

‣ 비교시점(조정기준일) : 2022년1월1일

적용단가                                                        단위 : 원/일

품명	기준시점 (2019.02.20.)	조정기준일 (2020.01.01.)	물가상승률	비고
상주기술자(고급)	301,354	311,735	3.44%	-
현지사무원(보통인부)	141,096	148,510	5.25%

물가변동으로 인한 계약금액 조정 총괄표                            단위 : 원

구분	검토내용	비고
물가변동 대상용역의 계약금액	1,303,900,000	붙임 참조
물가변동 적용제외 계약금액	285,120,000
물가변동 적용대가	1,018,780,000
물가변동 조정율	3.62%
물가변동 등락 대상 조정금액	36,850,000
선금급 공제금액	-
물가변동 조정 적용금액	1,340,750,000

건설사업관리용역 증감 대비표

공종	전체분		증/감	비고
	당초	변경
용역비(천원)	1,303,900,000	1,340,750,000	36,850,000	-

검토의견 및 조치계획

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제73조, 시행규칙 제72조에 의거 물가변동 조정 경과기간 90일 이상 및 계약금액의 조정율 3.62% 증가된 것으로

물가변동으로 인한 계약금액 조정 [증 36,850,000원] 하는 것이 타당함

본 방침에 의거 계약부로 계약변경 요청 통보

붙임  1. 건설사업관리용역 물가변동 계약금액 조정보고서(3회) 1부

2. 2022년 3회 물가변동 조정보고서 1부.  끝.