문서번호	역사문화재과-26980
결재일자	2022. 6. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		역사문화재정책팀장	역사문화재과장
차미래		신혜숙	06/30
			이희숙
협조

서울무형문화재 북촌 교육전시장 보수·보강공사 및 감리용역

계약 변경 계획

2022. 6.

문 화 본 부

(역사문화재과)

서울무형문화재 북촌 교육전시장 보수·보강공사 및 감리용역

계약 변경 계획

「서울무형문화재 북촌 교육전시장 보수·보강공사」의 일시중지 후 재개로 과업 수행 일정이 지연되어 해당 공사 및 감리용역의 준공기한을 연장하고자 함

□ 계약개요

구분	공사	용역
계 약 명	서울무형문화재 북촌 교육전시장 보수·보강공사	서울무형문화재 북촌 교육전시장 보수·보강공사 감리용역
계약기간	************************	*************************
계약금액	************	**********
계약업체	*******************	*********************
과업내용	******************************	*****************

□ 변경내용

ㅇ 변경사항: 계약기간 변경(준공기한 연장)

구 분	공사	용역
계 약 명	서울무형문화재 북촌 교육전시장 보수·보강공사	서울무형문화재 북촌 교육전시장 보수·보강공사 감리용역
변경사항	********************	******************** *********************
변경 전	******************************	*******************************
변경 후	********************************	********************************
귀책소재	************	************

ㅇ 변경사유

- 보수·보강공사의 추가 필요예산 확보를 위한 공사 일시중지로 과업 일정 지연

- 일시중지 사유 해소에 따라 공사를 재개하고, 중지기간 및 하절기 고려하여 공사 및 용역의 준공기한을 연장하여 계속 추진 필요

ㅇ 지체상금 부과 여부: 미부과

□ 행정사항: 계약 변경 의뢰(재무과)

붙임  합의각서 2부.  끝.