“그린 스마트 시티(Green Smart City) 강남”

등록번호	문화체육과-20740		주무관	체육시설팀장		문화체육과장		뉴디자인국장
			임종운	이상철		代곽정옥		전결 08/04 은승일
등록일자	2022.8.4.
결재일자	2022.8.4.
공개구분	대시민공개
			협조자
					재무과장		代김선덕
					계약팀장		代주소연

대명중학교 체육시설 설치공사

설계변경 및 준공기한 연장 계획

설계변경사유 : 현장여건이 당초 설계안과 상이한 부분이 많아 여건에 맞는

공정의 추가 및 변경으로 공사 지연

설계변경내용

구 분	공사내용
설치공사	토공량 증가, 철거물량 증가, 우수관 신설, 음수대 이설, 농구대 신설 등
관급자재	레미콘 물량 감소, 농구대 구매 추가
건폐 처리용역	건설폐기물 물량증가 및 설치공사 지연에 따른 용역기한 연장
감리용역	설치공사 기한연장에 따른 감리기한 연장(용역비 변동 없음)

설계변경금액 : 금31,907,570원 증

○ 설계변경으로 증액된 공사비용은 동일예산(시설비) 내에서 사용

※ 시설비 잔액 : 금75,248,360원

구 분	계약금액	설계변경	증감액	기한연장
설치공사	148,679,000	171,160,000	22,481,000	2022. 8. 31.
관급자재	348,337,630	352,245,000	3,907,370	2022. 8. 31.
건폐 처리용역	6,444,800	11,964,000	5,519,200	2022. 8. 31.
감리용역	7,000,000	7,000,000	0	2022. 9. 10.
합 계	510,461,430	542,369,000	31,907,570

	강 남 구

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	•「국민체육진흥법」제3조(체육진흥시책과 권장), 제8조(지방 체육의 진흥) •「체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률」제4조 제1항(국가와 지자체 등의 의무)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 대명중 체육시설 설치공사 설계변경 및 준공기한 연장
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 강남구민전체
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ○ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음.
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음.

대명중학교 체육시설 설치공사

설계변경 및 준공기한 연장 계획

대명중학교 체육시설 설치공사 시행 중 현장여건이 당초 설계안과 상이한 부분이 많아 여건과 환경에 맞는 공정이 필요하여 설계변경 및 준공기한 연장을 실시하고자 함

❒ 공사개요

○ 공 사 명 : 대명중학교 체육시설 설치공사

○ 대    상

구분	대왕중학교	비고
위치	강남구 역삼로87길 26
설치시설	인조잔디구장 1면, 육상트랙 2면, 농구장 1면, 피구장 1면

○ 계약현황

구 분	설치공사	관급자재	건폐 처리용역	감리용역
계약금액	148,679,000원	348,337,630원	6,444,800원	7,000,000원
계약대상	㈜옳담	㈜주안기업 등 7개 업체	㈜빅토리아	㈜스포츠그룹지인
공사(계약)기간	2022. 06. 10.~ 2022. 08. 08.	2022. 06. 13.~ 2022. 08. 15.	2022. 06. 10.~ 2022. 08. 08.	2022. 06. 10.~ 2022. 08. 18.
계약방법	제한경쟁입찰	조달구매	수의계약	수의계약

○ 공사내용

- (인조잔디구장 1면) 축구장 및 일반 운동장

ㆍ 인조잔디 포장 / 인조잔디기층포장

- (육상트랙 2면) 걷기 및 달리기 전용

ㆍ 시트형 탄성포장 / 콘크리트포장

- (농구장 1면) 농구장

ㆍ 플라스틱 바닥재 / 콘크리트포장, 매시휀스

- (피구장 1면) 피구장

ㆍ 플라스틱 바닥재 / 콘크리트포장

- (외부포장) 출입통로

ㆍ 콘크리트포장, 인조잔디포장 / 인조화강석블럭포장, 인조잔디기층포장

❒ 변경사항

○ 변경사유

- 현장여건이 당초 설계안과 상이한 부분이 많아 여건에 맞는 공정으로 추가 및 변경

- 학교측 일정으로 인한 원활한 인원 및 장비 투입의 어려움

○ 귀책소재 : 강남구청(지체상금 미부과)

○ 설치공사 변경

- 변경내용 : 토공량 증가, 철거물량 증가, 우수관 신설, 음수대 이설, 농              구대 신설 등

- 변경금액 : 금171,160,000원 (금22,481,000원 증액)

- 기한연장 : 2022. 8. 8. ⇒ 2022. 8. 31.

○ 관급자재 구매 변경

- 변경내용 : 레미콘 물량 감소, 농구대 구매 추가

- 변경금액 : 금352,245,000원 (금3,907,370원 증액)

- 기한연장 : 2022. 8. 15. ⇒ 2022. 8. 31.

○ 건폐 처리용역 변경

- 변경내용 : 건설폐기물 물량 증가

- 변경금액 : 금11,964,000원 (금5,519,200원 증액)

- 기한연장 : 2022. 8. 8. ⇒ 2022. 8. 31.

○ 감리용역 변경

- 변경내용 : 설치공사 기한연장에 따른 감리기한 연장

- 변경금액 : 용역비 변경 없음

- 기한연장 : 2022. 8. 18. ⇒ 2022. 9. 10.

❒ 소요예산

○ 총 공사비 : 금542,369,000원

- 증가액 : 금31,907,570원

공사내용	기한연장	계약금액	설계변경	증감액
설치공사	2022. 8. 31.	148,679,000	171,160,000	22,481,000
관급자재	2022. 8. 31.	348,337,630	352,245,000	3,907,370
건폐 처리용역	2022. 8. 31.	6,444,800	11,964,000	5,519,200
감리용역	2022. 9. 10.	7,000,000	7,000,000	0
합 계		510,461,430	542,369,000	31,907,570

○ 예산과목 : 문화체육과, 생활체육 활성화, 체육시설 인프라 구축, 강남구             내 체육시설 설치, 시설비 및 부대비, 시설비/감리비

❒ 행정사항

○ 공사내역 변경에 따른 계약사항 변경 : 재무과 협조

붙임 1) 대명중학교 체육시설 설치 계획 1부.

2) 설치공사 설계변경내역서 1부.

3) 건설폐기물 처리용역 설계변경내역서 1부.