문서번호	기전과-10257
결재일자	2020. 12. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
호정오		서승완	12/14 박문희
협조

2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사

설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12.

강서도로사업소

[기  전  과]

2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사
설계변경 검토보고

2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사와 관련하여 감리업체가 제출한 설계변경에 대하여 내용을 검토하고 그 결과를 보고 함

□ 관련근거

○ 2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(효병원 외 5개소)

설계변경 요청

- 문서번호 대영유비텍(주) 대영GE20A-12-32호(2020.12.11.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사

○ 공사위치 : 구로구 강서효요양병원 앞, 오류제1철길건널목, 오류동삼거리,

강서구 화곡터널입구, 개화사거리, 영등포구 여의한양쇼핑교차로

○ 공사내용

- 강서효요양병원 앞 : 신호운영 개선(신호등 신설 및 이설)

- 오류제1철길건널목 : 신호운영 개선(신호등 신설 및 이설)

- 오류동삼거리 : 신호운영 개선(신호등 신설 및 보행등 이설)

- 화곡터널입구 : 신호등 신설 및 철거

- 개화사거리 : 신호운영 개선(신호현시 조정)

- 여의한양쇼핑교차로 : 신호운영 개선(신호등 신설)

○ 계약금액 : 241,222,000원

○ 공사기간 : 2020.9.10. ∼ 2020.12.23.

○ 계약업체 : ㈜두화공영 대표 박정희

○ 감리업체 : 대영유비텍(주) 대표 조근환

□ 설계변경 사유 및 내용

○ 설계변경 사유

- 실정보고 승인내용 반영 내역서 변경 및 실제 시공물량 정산

- 보험료 등 제경비 정산 및 전기안전점검 수수료, 폐기물처리비 반영

- 공통대가 보완사항 수정 내용 반영

○ 설계변경 내용

공 종	주요 변경내용	변경금액
교통신호제어기	설치물량 감소 3(40→37)	감)402천원
교통신호등	설치물량 감소 3(51→48)	감)786천원
음향신호기	이설물량 증가 4(22→26)	증)1,243천원
교통신호지주	설치물량 감소 3(30→27)	감)4,426천원
신호케이블	설치물량 감소 31(1,115→1,084)	감)9,135천원
굴착 및 배관 외	설치물량 감소 282(562→280)	감)11,987천원
공통대가 보완	수정 내용 반영	감)1,245천원
제경비	간접노무비 및 보험료 등	감)29,548천원
합 계		감)56,268천원

※ 상세 내용 및 내역 붙임 설계변경 참조

○ 설계변경금액(총괄)

구 분	당 초	변 경	증감액
도 급 비	241,222,000원	184,954,000원	감)56,268,000원

□ 조치의견

○ 실정보고 승인내용 반영 내역서 변경, 실제 시공물량 정산, 보험료 등      제경비 정산, 전기안전점검 수수료 반영, 폐기물 처리비 반영 및 공통      대가 보완사항 수정 내용을 반영한 감리업체 설계변경 내용이 적정하여      이를 승인하고 설계변경을 시행하고자 함

붙임  교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사 설계변경 요청 1부.  끝.