“그린 스마트 시티(Green Smart City) 강남”

등록번호	문화체육과-21407		주무관	체육시설팀장		문화체육과장		뉴디자인국장
			임종운	이상철		代곽정옥		전결 08/12 문경수
등록일자	2022.8.12.
결재일자	2022.8.12.
공개구분	대시민공개
			협조자
					재무과장		代김선덕
					계약팀장		한혜란

대왕중학교 체육시설 설치공사

설계변경 및 준공기한 연장 계획 (3차)

설계변경사유 : 장마기간 우천 및 현장여건이 당초 설계안과 상이한 부분이 발생하여 여건에 맞는 공정의 감소 및 변경으로 공사 지연

설계변경내용

구 분	공사내용
설치공사	토공량 및 포장물량 감소 등
관급자재	레미콘 물량 감소
건폐 처리용역	설치공사 기한연장에 따른 용역기한 연장(용역비 변동 없음)
감리용역	설치공사 기한연장에 따른 감리기한 연장(용역비 변동 없음)

설계변경금액 : 금4,833,960원 감

구 분	계약금액	설계변경	증감액	기한연장
설치공사	95,775,000	91,463,000	- 4,312,000	2022. 8. 31.
관급자재	310,505,210	309,983,250	-521,960	2022. 9. 15.
건폐 처리용역	8,438,000	8,438,000	0	2022. 8. 31.
감리용역	6,000,000	6,000,000	0	2022. 9. 15.
합 계	420,718,210	415,884,250	- 4,833,960

	강 남 구

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	•「국민체육진흥법」제3조(체육진흥시책과 권장), 제8조(지방 체육의 진흥) •「체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률」제4조 제1항(국가와 지자체 등의 의무)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 대왕중 체육시설 설치공사 설계변경 및 준공기한 연장
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 강남구민전체
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ○ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음.
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음.

대왕중학교 체육시설 설치공사

설계변경 및 준공기한 연장 계획

대왕중학교 체육시설 설치공사 시행 중 장마기간 우천 및 현장여건이 당초 설계안과 상이한 부분이 발생하여 여건에 맞는 공정이 필요하여 설계변경 및 준공기한 연장을 실시하고자 함

❒ 공사개요

○ 공 사 명 : 대왕중학교 체육시설 설치공사

○ 대    상

구분	대왕중학교	비고
위치	강남구 광평로20길 7
설치시설	인조잔디구장 1면, 육상트랙 1면

○ 계약현황

구 분	설치공사	관급자재	건폐 처리용역	감리용역
계약금액	95,775,000원	310,505,210원	8,438,000원	6,000,000원
계약대상	임하건설㈜	㈜주안기업 등 7개 업체	제일이앤디㈜	㈜스포츠그룹지인
공사(계약)기간	2022. 05. 02.~ 2022. 08. 16.	2022. 05. 02.~ 2022. 08. 16.	2022. 05. 02.~ 2022. 08. 16.	2022. 05. 02.~ 2022. 08. 26.
계약방법	제한경쟁입찰	조달구매	수의계약	수의계약

○ 공사내용

- (인조잔디구장 1면) 축구장 및 일반 운동장

․ 인조잔디 포장 / 충격흡수배수판, 인조잔디기층포장

- (육상트랙 1면) 걷기 및 달리기 전용

․ 탄성 포장 / 콘크리트포장

- (외부포장) 차량진입로, 출입통로

․ 아스팔트콘크리트 포장 / 볼라드

❒ 변경사항

○ 변경사유

- 장마기간 우천 및 현장여건이 당초 설계안과 상이한 부분이 발생하여  여건에 맞는 공정의 감소 및 변경

- 학교측 일정으로 인한 원활한 인원 및 장비 투입의 어려움

○ 귀책소재 : 강남구청(지체상금 미부과)

○ 설치공사 변경

- 변경내용 : 토공량 감소, 포장물량 감소 등

- 변경금액 : 금91,463,000원 (금4,312,000원 감액)

- 기한연장 : 2022. 8. 16. ⇒ 2022. 8. 31.

○ 관급자재 구매 변경

- 변경내용 : 레미콘 물량 감소

- 변경금액 : 금309,983,250원 (금521,960원 감액)

- 기한연장 : 2022. 8. 16. ⇒ 2022. 9. 15.

○ 건폐 처리용역 변경

- 변경내용 : 설치공사 기한연장에 따른 용역기한 연장

- 변경금액 : 용역비 변경 없음

- 기한연장 : 2022. 8. 16. ⇒ 2022. 8. 31.

○ 감리용역 변경

- 변경내용 : 설치공사 기한연장에 따른 감리기한 연장

- 변경금액 : 용역비 변경 없음

- 기한연장 : 2022. 8. 26. ⇒ 2022. 9. 15.

❒ 소요예산

○ 총 공사비 : 금415,884,250원

- 감소액 : 금4,833,960원

공사내용	기한연장	계약금액	설계변경	증감액
설치공사	2022. 8. 31.	95,775,000	91,463,000	- 4,312,000
관급자재	2022. 9. 15.	310,505,210	309,983,250	-521,960
건폐 처리용역	2022. 8. 31.	8,438,000	8,438,000	0
감리용역	2022. 9. 15.	6,000,000	6,000,000	0
합 계		420,718,210	415,884,250	- 4,833,960

○ 예산과목 : 문화체육과, 생활체육 활성화, 체육시설 인프라 구축, 강남구             내 체육시설 설치, 시설비 및 부대비, 시설비/감리비

❒ 행정사항

○ 공사내역 변경에 따른 계약사항 변경 : 재무과 협조

붙임 1) 대왕중학교 체육시설 설치 계획

2) 대왕중학교 체육시설 설치공사 설계변경 및 준공기한 연장계획

3) 대왕중학교 체육시설 설치공사 설계변경 및 준공기한 연장계획(2차)

4) 설계변경내역서