문서번호	방재시설부-9565
결재일자	2014.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
이병환		김흥근	09/30 임춘근
협조

「잠원2빗물펌프장신설공사 외 1개소 전면책임감리용역」

준공기한연기 및 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 09.

「잠원2빗물펌프장신설공사 외 1개소 전면책임감리용역」

준공기한연기 및 설계변경 검토 보고

본 책임감리용역에서 수행중인 잠원2빗물펌프장신설공사 및 용허리빗물    저류조설치공사의 준공기한연기 및 추가공정(지하구조물 처리)처리 등에 따른  책임감리용역 준공기한 연기 및 설계변경사항 검토 보고임.

□ 관련근거

○ 신명감-920(`14.9.30) :【잠원2빗물펌프장 신설공사 외 1개소 전면 책임감리                                    용역 변경계약(총괄1회, 1차3회) 요청】

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 잠원2빗물펌프장신설공사 외 1개소 전면책임감리용역

○ 용역규모 : 잠원2빗물펌프장 신설 및 용허리 빗물저류조 설치

○ 용역기간 : 2013.04.01 ~ 2014.9.30

※ 잠원2빗물펌프장신설공사 공사기간 : 2013.1.3 ~ 2015.12.31

○ 용 역 비 : 금1,108,750천원(1차 : 743,600천원)

○ 용 역 사 : ㈜신명건설기술공사 외 2개사

□ 보고내용

○ 설계변경 및 준공기한 연기 사유

- 전체분 : 잠원2빗물펌프장신설공사의 준공기한 연기(`14.7.4⇨`15.12.31)에

따라 본 감리용역 준공기한 연기 및 감리원 배치계획 변경

- 1차분 : 본 책임감리용역에서 수행중인 용허리빗물저류조공사의 준공기한               연기(`14.9.30⇨`14.11.30)에 따라 감리용역의 준공기한 연기              및 감리원 배치계획 변경

- 준공기한 및 설계변경 내역(별첨 내역서 참조)

구 분		준공기한	계약금액(천원)	비 고
전체분 (1회)	당 초	2013. 4. 1 ~ 2014. 09.30	1,108,750	금액 변동없음
	변 경	2013. 4. 1 ~ 2015. 12.31	1,108,750
1차분(3회)	당 초	2013. 4. 1 ~ 2014. 09.30	743,600	증 73,700천원
	변 경	2013. 4. 1 ~ 2014. 11.30	817,300

- 감리원 투입계획서(전체분)

- 감리원 투입계획서(1차분)

○ 귀책사유 및 지체상금 부과 여부

- 귀책사유 : 도시기반시설본부 방재시설부

- 지체상금 : 미부과

□ 조치의견

○ 잠원2빗물펌프장신설공사와 용허리빗물저류조설치공사의 준공기한 연기에 따른 본 책임감리용역의 준공기한연기 및 설계변경(감리원투입)사항이 적정하므로

○ 계약부서에 본 책임감리용역에 대한 준공기한연기 및 설계변경을 의뢰하여 감리용역 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 변경계약요청공문(감리단) 및 사유서 각 1부.

2. 설계변경 내역서(전체분, 1차분) 각 1부. 끝.