				★ ◎
문서번호	기반시설부-2597			부원			기반시설부장				도시조성처장
보존기간	30년										전결	08/31
				권오종			노병철				나용환
결재일자	2022.08.31.
공개여부	공개			협조
일상감사	대상아님
강일도시개발사업 강일육교 보수보강공사 실시설계용역
준공기한 연기 검토
		서울주택도시공사
(도 시 조 성 처)

강일육교 보수보강공사 실시설계용역 준공기한 연기 보고

강일육교 보수보강공사 실시설계용역 시행중 특정공법(제품) 선정에 따른 내역 반영 및 하반기 노임적용에 따라 추가 소요되는 기간을 반영하여 준공기한을 연기코자함

Ⅰ		용역 개요

용 역 명 : 강일도시개발사업 강일육교 보수보강공사 실시설계용역

용역기간 : 2022.01.21. ~ 2022.08.31.

용 역 사 : ㈜서경기술공사 대표

도 급 비 : 47,997천원

Ⅱ		준공기한 연기

사유

- 특정기술 선정(LMC)에 따른 내역 반영 필요

- 하반기 노임 적용에 따른 추가 과업기간 필요

용역기간 변경

구분	착수일	준공일	비고
당초	2022.01.21.	2022.08.31.
변경	2022.01.21.	2022.09.30.	증)30일

- 지연배상금 : 미부과(계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 지체)

Ⅳ		행정사항

본 방침을 계약부서에 통보하여 변경계약 체결

붙임  계약자 준공기한 연기요청 공문(별첨) 1부.  끝.