실정보고 검토서

(비개착구간 계측기 설치 변경)

용역명

국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계) 건설공사 계측관리용역

용역개요

·위치: 화곡고가사거리~목동 919-1

·규모: 가시설 및 지하철 등 계측관리

·기간: 2021.5.14. ~ 2023.1.3.

·금액: 4,400,605천원

·용역사: ㈜테스콤엔지니어링

·감리단: ㈜한국종합기술

·설계사: 수성엔지니어링㈜

실정보고 건명

비개착구간 계측기 설치 변경 실정보고

실정보고

사유

기 승인한 비개착구간 복공가시설 변경으로 인해 추진기지 및 도달기지의 1단 버팀보 수량이 감소되어 계측기(하중계) 설치가 불가함에 따라 수량을 조정하고자 함.

건설사업관리단

검토의견

공사중 원활한 교통처리를 위하여 단속류 양방향 2차로를 추가 확보함에 따라 가시설 수량을 변경하여 발생한 사항이므로 계측기수량 또한 조정함이 적정하다고 판단됨.

변경(안)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
수 량	하중계 93개소	하중계 90개소	감) 하중계 3개소	비개착 구간 (2공구)
용역비	133,236천원	128,938천원	감) 4,298천원

예산조치계획

당초 용역비 범위 내 시행 가능

추가 행정절차 이행 필요여부

해당 없음

발주처

검토의견

책임건설사업관리기술자의 검토의견이 타당한 것으로 판단되므로

실정보고 승인 통보하고자 함.

결재

주무관

이시연

방재시설과장

최진우

방재시설부장

09/28

이동훈

주무관

최종구