				★ ◎
문서번호	기반시설부-3043			부원			기반시설부장				도시조성처장
보존기간	5년											10/04
				권오종			노병철				나용환
결재일자	2022.10.04.
공개여부	공개			협조
일상감사	대상아님
도시철도 8호선 문정역 연결통로 설치 및 부대시설 이.신설공사
관리청 합동 자문회의 개최
		서울주택도시공사
(도 시 조 성 처 )

관리청 합동 외부전문가 자문 시행

「도시철도 8호선 문정역 연결통로 설치 및 부대시설 이/신설공사」 시행중 기존 3번 출입구 철거를 위한 가시설 위치에 각종 지장물(지하매설물)이 다수 존재하여 공사진행이 어려운 실정으로, 이에 대한 해결방안을 모색코자 관리청 합동 외부전문가 자문회의를 개최코자함.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 문정역 연결통로 설치 및 부대시설 이 ․ 신설공사 공사기간 : 2018. 03. 05.~2022. 12. 31. 도 급 자 : ㈜흥화 외 2개사 공사금액 : 18,825백만원 (도급비 167억, 지급자재 11억, 이설비 10억) 건설사업관리 : ㈜유신 외 3개사

Ⅱ		현황 및 문제점

기존3번 출구 철거를 위한 가시설 현황

□ 현설계 : CIP

문제점

□ 지하매설물 조사결과, 흙막이 가시설(CIP) 설치 위치에 다수의 지장물(광역상수도[Φ800], 하수관, 지역난방 배관) 등이 위치하고 있어 설치 불가

당초 설계	조사결과

□ 설계대로 시공이 불가능함에 따라 도로관리청(동부도로사업소)에 대안을 제시하고 협의하였으나 추후 관리상의 문제점 등의 사유로 설계대로 전면철거 요구(합동 자문회의 개최결과에 따라 추가 검토)

- 제시(안)

▲ 지장물 이설은 관계기관 협의 및 이설기간 등 공사기간이 장기간 소요되고, 송파대로 방향으로 가시설 측벽파일 선형 조정하는 것은 송파대로에 지장물이 다수 분포되어 있어 가시설 안정성 확보 및 송파대로 도로점용등의 관계기관 협의가 어려움이 예상

▲ 향후 지하매설물 추가 매설 가능성 등을 반영하여 지표 하부 2m 이상 부분만 철거하고, 장래 지하철 확장 등 잔여구조물 철거가 필요한 경우 우리공사 비용으로 철거 및 폐기물 처리하는 조건으로 시행코자함

- 관련도면[제시(안)]

구 분	현 설 계	변 경 시 행 (안)
개 요	송파대로 차도부 측벽파일이 지장물에 간섭되어 기존 #3 출입구 구조물 철거를 위한 가시설 설치가 불가	측벽파일을 설치하지 않고 기존 #3 출입구 구조물을 최소로 철거하고 잔여 구조물을 매몰(개구부 마감 덮개 설치)
단 면 도
시공순서	가시설(CIP) 설치 및 터파기 → 기존 #3 출입구 구조물 철거 → 가시설 철거 및 되메우기	터파기(2.5m) → 기존 #3 출입구 구조물 철거(2.5m) → 되메우기
특 징	ㅇ 송파대로 차도부 측벽파일이 지장물과 간섭이 발생하여 설치 불가	ㅇ 지장물 간섭 해소 ㅇ 빠른 시공속도 및 공사비 절감 ㅇ 기존 #3 출입구 기존 구조물 매몰

Ⅲ		조치계획

기존 3번 출입구 철거는 본 공사의 준공을 위한 주공정(CP)으로, 해당 공정 지연은 전체 공사 및 문정도시개발사업 준공의 순연으로 이어질 수 있어 관리청 합동 자문회의에서 우리공사 의사를 적극 개진

자문위원회 개최

□ 일시 및 장소 : 2022.10.07. 14:00 공사회의실

□ 위원회 구성

구분	동부도로사업소 추천(서울시 Pool)	우리공사 외부전문가	비고
토질 및 기초	1	1
토목구조	1	1

※ 서울교통공사, 송파구청 담당 참석 요청(동부도로사업소 요구)

Ⅳ		행정사항

건축기술혁신부에 외부전문가 선정 요청

소요예산

□ 외부전문가 자문 수당

구분	단가	인원	금액	비고
외부전문가 자문수당	380,000원	4인	1,420,000원

※ 기술분야 심의수당(외부위원) 지급 기준

문을 입력하는 곳입니다.

붙임  설계변경검토자료(대안별 비교) 1부.  끝.