젊은경제·바른행정·신속성장, 바로 서대문!
		서대문구
수신자		내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(구립데이케어센터 확충 리모델링 공사, 건축·기계-1차)

「구립데이케어센터 확충 리모델링 공사」 관련 아래와 같이 현장여건 등을 반영한 설계변경을 실시하여 업무추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 구립데이케어센터 확충 리모델링 공사(건축·기계-1차)

나. 위    치 : 서울특별시 서대문구 연희로29길 5

다. 공사기간 : 2022.1.10.~2022.12.10.(총차)

2022.1.10.~2022.10.11.(1차)

라. 계 약 자 : ㈜아지건설 대표 국윤원 외 1개사

마. 감 리 자 : 엠아이엔건축사사무소(대표자 : 김정민)

바. 설계변경 사유

1) 현장 여건 반영 및 발주처(어르신복지과) 요청에 따른 변경

2) 고용개선지원비(주휴수당), 미사용 보험료(건강, 연금, 노인장기요양), 퇴직공제부금비, 산업안전보건 관리비 및 제경비 등 정산

사. 설계변경 내용 : 붙임3 변경내역서 참조

아. 공사비 증·감 내역

(단위 : 원)

구분	당 초 금 액	변경금액	증·감		비고
공급가액	752,255,428	795,650,000	증	43,394,572
부가세	75,225,542	79,565,000	증	4,339,458
ESC반영	20,189,280	20,189,280
총 계	847,670,250	895,404,280	증	47,734,030

자. 예산과목 : 노인복지증진, 노인복지인프라 확충 및 지원, 구립연희안산데이케어센터 설치, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 및 준공정산 검토 보고 1부.

2. 설계변경 의뢰(건축과 공문) 1부.

3. 변경내역서, 검증확인서, 감리 검토의견서, 합의각서 각 1부.

4. 시공사 공문 1부.

5. 고용산재보험 완납 증명원 1부.(5~11번 용량초과로 인한 서울시메일 별송)

6. 고용개선비 정산 1부.

7. 보험료 납부 확인서 1부.

8. 퇴직공제부금비 납부확인서 1부.

9. 건설기계대여대금지급보증수수료 1부.

10. 환경관리비 사용 내역 1부.

11. 1~9월 노무비 1부.  끝.

주무관							김희연			어르신재가복지팀장					이미경					어르신복지과장					김상한						복지문화국장					10/12 윤석환
협조자				주무관						이은지					★계약팀장							문혜선					재무과장								하인철
기획재정국장							강환복
시행			어르신복지과-19747									(						)		접수													(					)
우	03718					서울특별시 서대문구 연희로 242 서대문보건소 (연희동)															/
전화		02-330-1631						/전송			02-330-1660					/	hykim00@sdm.go.kr														/	부분공개(5)