				★ ◎
문서번호	전기사업부-2894			부원					전기사업부장					기전사업처장
보존기간	30년															10/12
				고다운					김재기					박철규
결재일자	2022.10.12.
공개여부	부분공개(5,7)			협조
일상감사	대상
								일상 감사		No.		488			감사					의견
										2022/10/12					임환택					의견없음
보조제목을 입력하는 곳
고덕강일지구 스마트도시 정보통신공사 발주보고
		서울주택도시공사
( 건설사업본부 기전사업처 전기사업부 )

고덕강일지구 스마트도시 정보통신공사

발주보고

고덕강일지구 스마트도시 조성을 위한 마스터플랜 및 실시설계 결과에 따라 편의·안전 등 시민이 체감할 수 있는 서비스도시서비스와 기반시설을 구축하기 위하여 『고덕강일지구 스마트도시 정보통신공사』를 발주하고자 아래와 같이 보고합니다.

1

사 업 개 요

공 사 명: 고덕강일지구 스마트도시 정보통신공사

위    치: 서울특별시 강동구 고덕동, 강일동 일원

개발면적: 1,659,344㎡

공사규모: 스마트폴(방범CCTV.공공Wifi,환경센서 등), 불법주정차CCTV, 자가통신망

시설물 현황

위 치 도

스마트도시 서비스· 기반시설		서비스 수량
		전체	1지구	2지구	3지구
스마트폴	방범CCTV	71	38	20	13
	공공Wifi	71	38	20	13
	환경센서	4	2	1	1
불법주정차 CCTV		10	4	4	2
자가통신망		통합 관제 센터	고덕2동센터	강일 동센터	상일2동센터

2

추 진 경 위

2021.10.20. : 고덕강일지구 스마트도시 정보통신 설계용역 발주시행(안)

2022.08.10. : 서울시 계약심사 요청(SH공사→서울시)

2022.08.18. : 서울시 계약심사 결과 알림

2022.09.14. : 사전내역심사 요청(견적발주부)

2022.09.15. : 사전내역심사 결과회신

2022.09.19. : 중소기업제품 구매 적절성 검토 요청

2022.09.19. : 중소기업제품 구매 적절성 검토결과 회신

2022.09.22. : 발주타당성 심사의뢰

2022.09.26. : 발주타당성 심의위원회 개최결과 통보

2022.10.06. : 고덕강일지구 스마트도시 정보통신공사 발주방안 보고

3

계약심사 및 사전내역심사 조정

1. 설계금액조정 및 최종 발주금액 현황                                   (단위:천원)

구 분	설계금액	서울시 계약심사(후)	사전 내역심사(후)	최종발주금액	비고
총공사비	5,429,355	5,109,204	5,070,417	5,441,682
도 급 비	4,319,219	3,999,068	3,829,108	3,829,108
지 급 비	1,110,136	1,110,136	1,241,309	1,241,309
이 설 비				371,264

※ 지급비는 서울시 계약심사 제외 항목

※ 세부현황은 붙임참조

4

발 주 시 행(안)

1. 공사기간: 착공일로부터 23개월

※ 관련근거: 정보통신공사 감리 표준품셈(제2장 정보통신공사 감리)

	○총공사비는 억원 기준이며, 십만 단위에서 반올림하여 적용 ※표준공사기간 = 7.19×54.410.29 = 22.91 = 23 개월 (계약 편의상 소수점 반올림)

2. 입찰참가기준 및 입찰방식

입 찰 방 법: 제한경쟁입찰

입찰참가면허: 정보통신공사업

공동도급방식 및 참여업체 구성

- 공동도급방식: 공동이행방식

- 구성원 수: 2개 업체 이내

- 지역의무 공동도급 최소 시공참여비율: 49%

입찰제한 방법 및 범위

- 시공능력평가액으로 제한(추정가격의 1배)

3. 발주서류

- [발주서류 다운로드]

4

행 정 사 항

상기 내용으로 견적발주부에 발주의뢰

붙임  1. 고덕강일지구 스마트도시 정보통신공사 발주방안 보고 1부

2. A_03. 설계내역서 1부

3. 공사비 세부현황(고덕강일지구 스마트도시 정보통신공사) 1부.  끝.