문서번호	동물복지1과-24343
결재일자	2022. 10. 19.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	동물복지1과장
고재철	서미려	전결 10/19
		代이은형
협 조
	시설과장		문석기

동양관 기계시설물 개선공사 준공연기

2022. 10.

서울대공원

동양관 기계시설물 개선공사 준공연기

동물사 사육환경 유지 고려 작업일정 조정으로 동양관 기계시설물 개선

공사 준공을 연기하고자 함

1	.	구매내역

건    명 : 서울대공원 동양관 기계시설물 개선공사

***********************

**********************

******************************

2	.	연기사유

악어사 풀 3개소 전동밸브 교체시 악어 생육환경 고려 1개소씩(2일) 3개소 6일 연속작업이 필요하여 일정 조율로 공기지연이 불가피

밸브 설치 후 자동제어 포함 연동테스트 일정 필요

※ 단, 밸브 설치 위치는 관람장 외로 공사로 인한 관람지연 없음

3	.	납품기한 연기

납품기한 : 위와 같은 사유로 아래와 같이 변경하고자 함.

건 명	납품기간		비고
	***	***
동양관 기계시설물 개선공사	*************	*************	****

***************

***********************