문서번호	시설관리과-26329
결재일자	2014.10.2.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
황필권	손병희	나태산		10/02 안운길
협 조

2014년 가압장 배수지 전기시설물 유지보수 2차공사 추진계획

2014. 10.

중부수도사업소 시설관리과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014년 가압장 배수지

전기시설물 유지보수 2차공사 추진계획

2014년 가압장 배수지 등의 전기시설물 보수공사를 진행함에 따라 계약금액을 초과됨이 예상되기에, CCTV 유지보수관리 사항을 포함한 2차공사계약을 시행함으로써 업무효율을 향상시키고 아리수의 안정적 급수에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		전기시설물 유지보수공사 현황

2014년 전기시설물 유지보수 공사 현황

○ 계약금액 : 86,283 천원(연차수계약)

○ 계약기간 : 2014.3.11. ~ 2015.2.28.

○ 기간 공사 내용

- 1차작업 : 본부순회점검 지적사항 보수공사 및 유지보수 공사 4식

- 2차작업 : 유량계 전송반 보수공사 및 유지보수 공사 3식

- 3차작업 : 배밭A증압장 외 2개소 전기공사 및 유지보수 공사 3식

- 4차작업 : LED등기구 교체 공사 및 유지보수 공사 1식

○ 작업 완료 금액 및 잔액	(단위 : 원)

구 분		계약금액	작업완료금액		잔액		비고
			금액	기성고	금액	기성고
도급금액	공급가액	78,439,764	67,675,524	86.28%	10,764,240	13.72%
	부가가치세	7843,976	6,767,552		1,076,424
	총공사비	86,283,740	74,443,076		11,840,664
	2014년도	80,000,000	74,433,075	93.15%	5,566,925	6.95%	1차수
	2015년도	6,283,740		0%	6,283,740	100%	2차수

* 2014년도 1차수계약금액은 80,000천원으로 약 5,600천원 남아 예정 공사진행불가

* 향후 예정된 공사진행을 위해 변경계약을 통해 2015년 2차수계약금액을 2014년에 모두 사용하고 새로 2차공사를 발주할 필요가 있음

향후 예정된 공사

○ 보광가압장 전기공사

- 2014년 투자사업의 일환으로 제어반 교체 시 전기공사 시행

- 공사내용 : 제어반 교체 시 전력선 및 제어선 교체 시설물 이설공사 및 펌프 제어반간 격벽설치공사

**********************

○ 도원가압장 전기공사

- 2014년 투자사업의 일환으로 제어반 교체 시 전기공사 시행

- 공사내용 : 제어반 교체 시 전력선 및 제어선 교체 시설물 이설공사

**********************

○ 유량계 전송반 철거공사

- 본부 유량계 점검 지적사항으로 운휴 유량계에 대한 철거공사 시행

- 공사내용 : 유량계 전송반 4개소 철거

*********************

○ CCTV 유지보수공사

- 가압장 배수지 원격감시(CCTV)시스템 개선계획[시설관리과-7130(2014.3.17.)]와 관련하여 CCTV의 신속한 수리와 교체를 위해 연간단가 시행

- 공사내용 : 수리가 필요한 CCTV카메라 및 녹화운영서버에 대한 유지관리

**********************

보고자 의견

○ 『2014년 전기시설물 유지보수 공사』의 경우 조기에 계약금액이 소진된 이유는 전기공사의 수의계약을 지양하는 가운데 계획에 포함되어있지 않았던 ①본부의 낙뢰방지회로구축 ②본청 감사과 지적사항(월곡대배수지) ③ 유량계 전송반 전기공사의 증가 등 새롭게 추가된 공사내역이 들어갔기 때문임

○ 향후 예정된 전기공사만을 추진하기 위해서는 잔액을 지출하고도 계약금액의 10%가 넘기 때문에 재발주가 필요하며, 혹여 긴급복구가 필요한 사항이 발생할 여지가 있으므로 추가적인 전기시설물 유지보수 2차공사(연간단가)를 미리 발주할 필요가 있음

○ 현재 해당 공사의 잔액은 2차수 계약금액을 포함하더라도 보광가압장 전기공사의 일부(격벽공사 제외)만을 수행할 수 있는 상황이므로, 이를 진행한 후 변경계약 후 조기준공처리하도록 함

Ⅱ		사업개요

추진근거

○ 가압장·배수지 운영관리 개선방안 [본부장 방침-3164(2012.7.27.)]

- 신속한 복구를 위하여 연간단가계약으로 전기공사를 추진하도록 함

○ 가압장 배수지 원격감시(CCTV)시스템 개선계획[시설관리과-7130(2014.3.17.)]

- CCTV유지보수공사 연간단가으로 CCTV유지관리에 만전을 기함

사업개요

○ 시행대상 : 가압장 배수지 증압장의 전기분야 시설물(CCTV포함)

○ 시행방법 : 연간단가계약으로 공사발주 후 시설물 유지 관리

○ 시행기간 : 발주 후 ~ 2015.4.30.

사업방향

○ 긴급한 전기공사 필요 시 신속한 복구공사가 가능하도록 계약 추진

○ 다음해 연간단가계약 시까지 긴급한 복구공사의 공백을 없게 하기 위해 시행기간을 다음해 4월까지로 연장

○ 기존의 심사를 받았던 『2014년 전기시설물 유지보수 공사』를 기준으로 관내 전기시설물 정비에 맞는 적정 계약금액 설정

○ 타사업소가 진행하듯 연간단가에 CCTV유지보수를 포함하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

- 서부, 남부, 강동수도사업소는 현재 CCTV유지보수 부분을 전기연간단가에 포함

- 가압장 배수지 원격감시(CCTV)시스템 개선계획에 맞춰 CCTV 유지보수 연간단가 계획금액을 추가하여  『2014년 전기시설물 유지보수 추가공사』를 시행하고도록 함

사업내용

○ 가압장 배수지 전기시설물 보수 및 교체공사

○ 가압장 배수지 CCTV설비 유지보수공사

○ 기타 정비가 필요한 시설물에 대한 정비공사

Ⅲ		발주계획 및 향후 추진일정

발주계획

○ 계약방법 : 제한경쟁 입찰(지역제한)

- 제한경쟁입찰 사유 : 긴급한 작업지시를 수행할 수 있도록 서울지역의 전기공사업체 중에 대상을 선정함

○ 입찰참가자격 : 전기공사업 제4조에 의한 전기공사업 등록을 필하고 주된 영업소의 소재지가 서울특별시에 위치한 업체

○ 사업비 : ************

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 기타교체비

향후 추진일정

○ 2014.10. : 공사계약 및 착공

○ 2014.10. ~ 2015.4. : 공사시행

Ⅳ		행정사항

공사 설계 발주 및 계약의뢰 : 기전팀

『2014년도 전기시설물 유지보수공사』 설계변경 및 변경계약요청 : 기전팀

끝.