문서번호	도로시설과-27960
결재일자	2022. 10. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로기전팀장	도로시설과장
김경일		代채충일	10/25
			고영준
협조

『도로터널 피난·대피환경 개선 용역』

10월 2주차 공정회의 결과 보고

2022. 10.

	안전총괄실 (도로시설과)

『도로터널 피난·대피환경 개선 용역』

10월 2주차 공정회의 결과 보고

도로시설과장 :고영준☎2133-1650 도로기전팀장 : 신용휴☎1671 담당 :김경일☎1677

「도로터널 피난·대피환경 개선용역」과 관련하여 10월 2주차 공정회의를 실시하고 결과를 보고 드림.

1		용 역 개 요

○ 과 업 명 : 도로터널 피난·대피환경 개선용역

○ 용역기간 : 착수일부터 12개월('22.8.16. ~ '23.8.15.)

○ 용 역 사 : ***********************

○ 계약금액 : ******

○ 과업내용

- 도로터널의 피난·대피환경 개선관련 국내·외 기준 및 사례조사

- 도로터널(34개소)의 현장조사 및 피난대피환경 개선방안 제시

- 피난·대피시설 미흡 도로터널(6개소)의 정량적 위험도 평가

- 피난·대피환경 개선 타당성 조사 및 기본계획 수립

- 피난·대피환경 개선계획의 적정성 여부 검토를 위한 기술자문 수행

- 방재시설 강화에 따른 사업비 산출 및 경제성 분석(투자심사)

- 제연보조설비 시범설치대상(1개소) 기본 및 실시설계

2		추 진 경 과

*********************

*************************

3		공정회의 내용

○ 일  시 : '22.10.18.(화) 16:00 ~ 18:00

○ 장  소 : 본관 2층 도로시설과

○ 참석자 : *******************************

○ 용역사 과업 수행내용 및 추진계획

구분	업 무 내 용		비고
	10월초 2주간 실적 2022.10.1(토)~2022.10.16(일)	10월말 2주간 계획 2022.10.17(월)~2022.10.31(월)
기계 소방	- 과업내용서 검토(~계속) - 제연보조설비 시범설치대상(1개소) 기본 및 실시설계(******) ․ 관리대장 접수(10/11) ․ 동망봉터널 보고서 작성(~계속) - 월드컵터널 내 피난대피시설 관련 내용 접수(10/11) ․ ****** 요청사항 접수 및 검토 내용 전달(10/12)	- 과업내용서 검토(~계속) - 제연보조설비 시범설치대상(1개소) 기본 및 실시설계(******) ․ 정량적 위험도 평가분석(QRA) 진행 ․ 동망봉터널 보고서 작성(~계속)	****** ****
전기 토목	- 시범설치구간(******) 협의 ․ 제연보조설비 설계(안) 도출 - **********의 현장조사 ․ 전기분야 터널별 현장조사 ․ 피난연결통로 설치 가능성여부 검토 ․ 교통량 조사 수행(********) - ********************************* **********************	- 시범설치구간(동망봉 터널) 협의 ․ 운영관리자 협의 ․ 2차 현장조사 (내외부) ․ 터널 실험계획 (인발시험 등) ․ 제연보조설비 설계(안) 도출 - **********의 현장조사 ․ 전기분야 터널별 현장조사 ․ 피난연결통로 설치 가능성여부 검토 ․ 교통량 조사 수행********** ․ 33개소 교통량조사 수행 계획 ․ 피난연결통로 설치 관련 조사자료 분석 - ********************************* **********************	****** ****

○ 교통량 조사 공정률

과업의 세부내용	교통량 조사	비고
************************** *************************	11월 첫째주 완료 예정	****** ****
************************	11월 첫째주 완료 예정
**************************	100%

○ 서울시 요청사항

- 세부 추진내용 및 협의사항 등은 분야별 감독관과 검토 진행

4		향 후 계 획

**********************************

붙임 : 2022년 10월 중간보고서(1차) 1부.  끝.