문서번호	급수운영과-32999
결재일자	2022. 10. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김종섭		양봉우	10/27
			이규희
협조

상수도 시설물 정비공사 작업지시 변경 보고

2022. 10. 27.

강동수도사업소

(급수운영과)

상수도 시설물 정비공사 작업지시 변경(취소) 보고

□ 관련근거

○ 시설물 작업지시 및 감독 요청(시설물 6~28)

[급수운영과-26493호, 2022.7.12.]

○ 시설물정비공사 작업지시 작업기간 변경 통보(시설물 6~28)

[급수운영과-30114호, 2022.9.15.]

□ 공사현황

************************************

***************************

***********************

************************************

**********************

□ 작업변경(취소) 대상

○ 대상 : 거마배수지 바닥슬래브 방수층탈락부 방수방식도장 외 22건

※ 상세내용 : 붙임 작업지시서 참조

□ 검토내용

○ 배수지 방수방식공사는 배수작업, 그라인딩, 건조, 도막식 방수방식 작업 등 3주 이상이 소요되며,

○ 기존 작업지시 내용은 소규모 손상 물량에 대해 방수방식 작업범위를 최소화하여 개별적으로 작업지시한 사항으로 작업에 어려움이 있으며, 작업완료 후 내구성이 부족할 것으로 예상됨.

○ 따라서 기존 작업지시 건은 취소하고, 현재 시행하고 있는 「2022년 오금배수지 등 4개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역」의 보수보강 물량을 보완한 후 추가손상 물량을 포함하여, 용역준공 후 재작업지시를 통해 시설물을 정비하는 것이 시설물 관리에 효율적일 것으로 판단됨.

□ 조치계획

○ 2022년 송파구 관내 상수도 시설물 정비공사의 시설물 6~28 작업지시 건에 대해 계약업체인 ************에 취소 통보하고, 향후 정밀점검용역 준공 후 거마배수지 내부 보수물량에 대하여 재작업지시 시행.

붙 임  시설물 작업지시서 1부.  끝.