아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 계약변경(준공기한 연장) 의뢰

1. 도로시설과-28413(2022.11.03.)호와 관련입니다.

2.「2030 도로터널 방재시설 강화기준 검토용역」에 대하여 아래와 같이 변경 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 2030 도로터널 방재시설 강화기준 검토 용역(*********************)

나. 계 약 자 :****************

연번	상 호	주 소	대표자
1	*******	*****************************	***
2	******	********************	***
3	********	*************************	***
4	***********	*************	***

다. 계약금액 : *****************************

라. 변경내용

○ 준공기한 연장

계약금액	당 초	******************************
	변경 후	******************************
	증․감액	변동 없음
계약기간	당 초	2021.11.19.~2022.11.18.
	변경 후	2021.11.19.~2022.12.23.

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

바. 변경사유 : 붙임 1 준공기한 연장 검토 보고 참조

붙 임 1. 준공기한 연장 검토 보고 1부.

2. 준공기한 연장의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. (변경)과업내용서 1부.  끝.

	도 로 시 설 과 장
주무관	김경일		도로기전팀장	신용휴		도로시설과장	11/03
고영준
협조자
시행	도로시설과-28451	(	2022.11.03	)	접수		(		)
우	04515	서울 중구 덕수궁길 15 시청 별관 1동 물순환안전국 물재생시설과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3843	/전송	02-2133-1043	/	kki73@seoul.go.kr	/	부분공개(5)