				★ ◎
문서번호	도시조성부-3809			부원			도시조성부장				도시조성처장 직무대행
보존기간	30년											11/11
				이영규			명경선				명경선
결재일자	2022.11.11.
공개여부	공개			협조	기반시설부장			노병철
일상감사	대상아님
보조제목을 입력하는곳 입니다
「오금지구 소음저감시설 설치공사 」 토공사에 따른 임시적치장 운영 검토 보고
		서울주택도시공사
(도시조성처 도시조성부)

서울오금 공공주택지구 조성공사(소음저감시설 설치공사)

토공사에 따른 중간적치장 운영 검토 보고

「서울오금 공공주택지구 조성공사(소음저감시설 설치공사)」사업부지가 협소하여 토공사에 발생하는 토사의 현장 유용이 곤란하여 원활한 공사 추진을 위하여 임시적치장을 운영하고자 검토보고합니다.

Ⅰ		공사 개요

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울오금 공공주택지구 조성공사(소음저감시설 설치공사)

○ 공사기간 : 2022.09.05. ~ 2023.06.01.

○ 공사금액 : 1,287,720,800원

○ 계약상대자 : 에스트건설(주) 외 1개사

○ 위치도 및 공사내용

방음벽 설치 : L=73m, H=10.0m / 저소음비배수성포장 : A=11,289㎡

Ⅱ		현황 및 문제점

□ 현황

○ (설계내용) 본공사는 터파기(A) 4,117㎥, 되메우기 및 다짐(B) 3,673㎥, 사토(C=A-B)(59.7km) 443㎥ 설계되어 있으며, 기타 유용토 등 토공사가 설계에 반영되어있지 않음.

○ (현장여건) 공사 현장은 도심지내 방음벽설치를 위한 선형 현장으로 현장내 토사를 유용할 가용부지가 협소한 실정임.

□ 문제점

○ (부지 협소) 현장이 협소하여 터파기 시 발생하는 토사를 현장내 유용하여 공사하기 곤란한 실정으로, 발생토 처리 검토가 필요함.

Ⅲ		검토 결과

□ 발생토 처리방안

○ (원칙) 발생토사에 대하여 최대한 부지내에서 유용함.

○ (예외→임시적치장 운영) 부지협소에 따라 외부 반출이 불가피할 경우, 사업지 인근의 우리공사 현장인 성동구치소(약 3km)에 임시적치장을 운영하여 임시적치장으로 반출 후 토사의 질(양호/불량)에 따라 되메우기시 활용 혹은 사토 처리함.

○ (비용) 현장/성동구치소간 운반비용(반출/반입 비용)을 반영하고 임시적치장 운영에 필요한 휀스, 토공 쌓기, 천막 덮기, 배수로 설치 등은 필요시 반영하여 설계변경 함.

- (양질토사) 터파기토사 : 현장에서 임시적치장으로 반출(비용반영)

되메우기토사 : 임시적치장에서 현장으로 반입(비용반영)

사토 : 임시적치장에 남은 토사에 대하여 사토처리(비용반영)

- (불량토사) 터파기토사 : 현장에서 임시적치장으로 반출 및 사토(비용반영)

되메우기토사 : 임시적치장내 잔토반입(비용반영) 및 외부토 무대반입

사토 : 임시적치장에 남은 토사에 대하여 사토처리(비용반영)

○ 폐기물

- (원칙) 발생현장 직상차 후 즉시 반출

- (예외→임시적치장 운영) 토공사시 폐기물이 혼재되어 발생하는 등 폐기물 발생시 임시적치장으로 운반하여 폐기물 선별 후 폐기물처리

- (비용) 현장에서 성동구치소까지 운반비용을 반영하여 설계변경 함.

Ⅳ		향후 계획

□ 상기 검토결과와 같이 임시적치장(성동구치소)을 운영하고 실정보고 및 공사 추진(도시조성부)

□ 임시적치장으로 성동구치소 부지 사용 협조(기반시설부)

붙임표시