실정보고 검토서

[수목유지관리(방제 및 생육환경 개선), 새로운 광화문광장 조성사업(시민광장)]

공사명	새로운 광화문광장 조성사업(시민광장)
공사개요	· 위 치 : 세종로 1-68 일대 · 규 모 : 도로정비 등 33,370㎡ · 공사기간 : '21.01.08. ~ '22.11.30. · 도 급 비 : 228억원				· 시 공 사 : 신성종합조경(주) 외 3 · 감 리 단 : 제일엔지니어링 외 2 · 설 계 사 : ㈜씨에이조경기술사사무소 외 2
실정보고 건명	수목유지관리(방제 및 생육환경 개선)********************************
실정보고 사유	- 수목의 해충방제 및 생육환경 개선을 위해 수목전문가 자문결과를 반영하여 방제 및 엽면시비 비용을 설계에 반영코자 함. ·천공성 해충방제 : 195주, 9,885L(3회) ·흡즙성 방제 및 엽면시비 : 195주, 3,295L(1회) ·소나무 방제 : 14주, 775L(1회)
건설사업관리단 검토의견	- 대형수목의 유지관리를 위한 방제작업 계획과 방제비는 적정하게 산출됨
변경(안)	****** ********************************************************************************************************************************************* ********************************************************* ******** ***************************************************************************************************************************************************************
예산조치계획	당초 사업비 범위 내 시행 가능
추가 행정절차 이행 필요여부	해당없음
발주처 검토의견	책임건설사업관리기술자의 검토의견이 타당한 것으로 판단되므로 실정보고 승인 통보하여 추후 설계변경 반영하고자 함.
결재	주무관	김현곤	공원시설과장	이병호		방재시설부장	11/25
							이동훈
	주무관	김규희