문서번호	도로보수과-29505
결재일자	2022. 11. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
권은용		11/25
		代맹우재
협 조
	주무관		맹우재

2022년 무단횡단금지 시설물 설치사업(통일로)  설치 변경계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022년 무단횡단금시시설 설치사업(통일로)

설치 변경계획 보고

2022년 무단횡단금지시설 설치 구간 중 규제 미심의 구간에 대해 설치를 취소하고 경찰서 변경요청구간으로 설치하여 시민들의 안전사고(교통사고) 예방에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 2022년 도로부속시설물 설치사업 무단횡단금지시설 설치계획 보고

○ 도로보수과-22129호(2022.5.19.)

□ 무단횡단 금지시설 설치 구간 변경요청

○ 서울은평경찰서 경비교통과-8731호(2022.11.24.)

Ⅱ		보고내용

□ 당초 계획 구간인 통일로 노선에 대해 경찰서 현장조사 결과, 차로폭이 좁아 설치가 불가한 사항임

○ 당초 계획구간

도로명	위 치	연 장 (m)	소요예산 (천원)	비고
통일로	************	***	******	차로폭 협소로 현장설치불가

□ 은평경찰서 요청구간으로 위치 변경

Ⅲ		조치의견

□ 당초 계획구간에 차로폭 협소로 설치계획에서 제외하고은평경찰서 요청구간으로 변경 설치코자 함

○ 변경구간

도 로 명 (위 치)		변경구간 연장 (m)	소요예산 (천원)	비고
당 초	변 경
***********	***********	***	******

Ⅳ		설치계획

□ 기*******************************************************************************

Ⅵ		향후계획

□ 22.12월 중순 : 사업완료(준공)

붙임 : 1. 관련공문 1부.

2. 교체구간 위치도 및 현황사진 1부.  끝.