문서번호	건축부-34182
결재일자	2022. 12. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
이제관		최장길	12/05
			신명승
협조

『AI지원센터 건립공사』

스마트 건설안전장비 실정보고 검토보고

2202.12.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『AI지원센터 건립공사』

스마트 건설안전장비 실정보고 검토보고

「AI지원센터건립공사」관련 중대재해 예방을 위한 스마트 건설안전장비 도입에 따른 건설사업관리단 부터 제출된 실정 보고에 대한 검토 결과를 보고 드림

*******30,415천원

1		공 사 개 요

○ 공 사 명 : AI지원센터건립공사

○ 위    치 : 서울시 서초구 태봉로 108(우면동 141)

○ 규    모 : 지하1층/지상7층, 연면적 10,020.05㎡

○ 공사기간 : ***********************************************

○ 계약금액 :*******************************************

○ 공사관계사 : 시공-대라수건설주식회사,감리-(주)종합건축사사무소 근정

○ 현 공 정 : 지상3층 거푸집 공사중 (공정율 44%)

2		실정보고 검토내용

○ 근 거

- 중대재해 예방을 위한 스마트 안전기술 도입 시행계획

(도시기반시설본부 본부장 방침, 2022.4.5.) - AI지원센터현장 2022년 도입 의무현장

- 스마트건설안전장비 재변경 실정보고

구분	당초	변경	변경사유	비고 (공사비)
*****	*****	*************** *************** *************	****************	********

〔근정제2022-514(’22.11.24.호)〕

○ 주요 변경 내용

*********************************************

***************************************

○ 단가 적용기준(공사계약 일반조건 제7절 계약금액의 조정) 주요 변경 내용

*****************************

3		건설사업관리단 검토의견

○  공사계약 일반조건에 의거 안전관리비에 반영하고 준공시 정산함이 타당함.

4		처 리 의 견

○ 책임건설사업관리기술자의 검토의견에 따라 실정보고 승인.

○ 원할한 공정관리를 위하여 승인사항은 현장에 반영·시공토록 우선 조치

○ 추후 관련절차에 의거 설계변경 시, 금액 확정(추후, 설계변경 자문 절차, 계약심사 등에 따라 변동 될 수 있음을 통지)

붙임 :  1. 스마트 건설안전장비 재변경 실정보고  1부.  끝