문서번호	급수운영과-23930
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김승완		10/08 代유인행
협 조
	주무관			이상무

준공기한 연기보고

2014. 10

명에 의거 「구로1동외 6개동 상수도공사(단가계약)」급수공사 감독업무 수행 중 발생한 사항에 대하여 그 현황을 아래와 같이 보고합니다.

2014.  10.   .

보고자 시설7급  성명 김승완

1. 공사 현황

가. 공사 위치 : 구로구 가리봉동 137-23호(신설12)

나. 공사 개요 : D=50mm, L=6m

다. 공사 기간 : 2014.09.18 ~ 10.20

2. 보고 내용(감리원 실정보고 : ㈜이준엔지니어링 100-115호(‘14.10.07)

- 구로구 가리봉동 137-23호 건물신축에 따른 급수공사(D=50mm)는 건축자재적치

등으로 준공기한내 공사시행이 불가한 실정임

3. 조치 의견

가. 상기와 같이 준공기한 내 공사가 불가함에 따라 공사기한을 연기 조치하여 공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

나. 귀책사유 및 지체상금 부과여부 : 미부과

다. 공사기한 변경

연번	위 치	지시 번호	공사기한 변경		비 고
			당 초	변 경
1	가리봉동 137-23호	신설12	2014.9.18 ~ 10.10	2014.9.18 ~ 10.20

따로붙임.  감리 실정보고서 1부.  끝.