문서번호	도로과-30979
결재일자	2022.12.08
공개여부	비공개(5)
방침번호	부구청장 제1458호

주무관		굴착복구팀장	도로과장		건설교통국장		부구청장
진종안		代진종안	최강윤		장병조		12/08
							김경탁
협 조						기획경제국장		권병식
						재무과장		이성수
						계약심사팀장		代오승우
						계약팀장		심은진
						교통개선팀장		代안도연

	강동을 새롭게, 구민을 신나게!

「2022년 도로굴착 복구공사(연간단가)」 설계변경(제4회) 및 준공기한 연기 검토 보고

2022. 12. 07.

강동구

(도로과)

사전 검토사항

☞ 해당사항에‘■’표시 후 필요 시 괄호 안에 검토내용을 기입하시기 바랍니다.

검 토 항 목		검 토 여 부
법규 검토	관련법규	□ 검토 완료(법규명: )	■ 해당 없음
	공직선거법	□ 검토 완료	■ 해당 없음
재원확보		□ 국비 ■ 시비 □ 구비 □ 민자 유치 ■ 기타(도로굴착복구기금)	□ 비 예 산
주민의견 반영 및 참여방안		□ 설문조사 □ 공청회 □ 토론회 □ 공모 □ 기타( )	■ 해당 없음
갈등관리		□ 이해관계자 간 갈등 발생 가능 □ 민원발생 가능 (갈등요소: )	■ 해당 없음
전문가 자문		□ 이행 완료 □ 예정 (이행방안: 워크숍, 자문위원회 등)	□ 해당 없음
협업 협치	타 기관 및 단체	□ 중앙부처 □ 서울시 □ 타 지자체 □ 투자출연기관 □ 민간단체 □ 구의원 업무공유 □ 기타( )	■ 해당 없음
	관 련 부 서	□ 협업 필요(해당부서: )	□ 해당 없음
추진절차		■ 일상감사 □ 투자심사 □ 용역심사 □ 민간투자사업 심의 □ 타당성 검토 □ 공유재산 심의 □ 의회 심의 ■ 설계변경 심의 등	□ 해당 없음
홍보방안		□ 보도자료 제공 □ 기자 설명회 □ 구 소식지 □ SNS □ 기타( )	■ 해당 없음
기타 고려사항		□ 인권영향평가(구민 인권보장 및 증진) □ 아동친화 및 아동영향평가 □ 교육영향평가(학생 안전과 수업권 확보) □ 여성친화 및 성별영향 □ 건강친화요소 □ 환경인지 □ 사회적 약자 배려 □ 타 기관 사례 파악 비교 □ 안전대책 ■ 유지관리비용 □ 시장조사 □ 미래행정 수요예측 □ 고용효과 □ 행사의전 ■ 바른 우리말(행정순화어)

「2022년 도로굴착 복구공사(연간단가)」

설계 변경(제4회) 및 준공기한 연기 검토 보고

『 2022년 도로굴착 복구공사(연간단가) 』 시행시 현장 여건 변경 등으로 발생한 실시공 작업 물량 증·감 사항을 반영하여 설계변경 시행하고 동절기 원활한 복구 공사를 위해 준공 기한을 연기하고자 함.

1		공사개요

□ 공 사 명 : 2022년 도로굴착 복구공사(연간단가)

□ 규    모 : 보도 블록 포장(42a), 아스콘 포장(148a), 경계석 설치(890m)

□ 총공사비 : 금2,779,755천원

○ 도급비 : 1,779,755천원, 관급자재비 : 805,690천원, 이전비 : 194,310천원

□ 기    간 : 2022. 3. 23. ~ 2022. 12. 31.

□ 계약업체 : 비휴건설(주) 외 1, 대표 이성재 외 1인

2		근거 및 변경 내용

□ 설계 변경 근거

○ 「2022년 도로교통 소통 개선사업」 외 1건 시행 계획 및 계약금액 조정(증액) 검토[부구청장 방침 제(1279)호]

○ 「2022년 도로교통 소통 개선사업」 관련 공사 의뢰(교통행정과-108622)

□ 설계 변경 사유

○ 2022년 도로교통 소통 개선사업 공사 시행에 따른 시공물량 반영

○ 도로굴착복구 허가신청 증가에 따른 굴착복구 작업물량 증·감 사항 반영

□ 설계변경 현황

○ 주요 설계변경 물량

공 종	단위	당초수량	변경수량	증 · 감	비 고
아스팔트 포장	a	148	183	증)35
보도블록 포장	a	42	55	증)13
경계석 설치	m	890	710	감)180
경계 측구	m	1,090	1,083	감)7

○ 공사비 증·감 현황

(단위 : 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 ․ 감
총공사비	2,779,755,400	2,579,014,650	감)200,740,750
도 급 비	1,779,755,400	1,879,727,000	증)99,971,600
관 급 비	805,690,000	579,607,650	감)226,082,350
이 전 비	194,310,000	119,680,000	감)74,630,000

3		예산과목

○ 도로과, 도로건설 및 도로 시설물 구축, 도로 굴착 복구 기금, 미복구 도로관리, 시설비 및 부대비, 시설비(도로굴착복구기금)

○ 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 도로교통 소통 개선, 시설비 및 부대비, 시설비(시비)

4		준공기한 연기

○ 준공 기한 변경

- 당초 : 2022. 12. 31. →  변경 : 2023. 3. 31.

○ 연기 귀책 소재 : 시행청(강동구청)

○ 연기 사유

- 동절기 굴착통제 기간에도 주민 생활과 직결되는 전기, 가스, 상·하수도 등 긴급 굴착공사가 필요한 실정으로 『2023년 도로굴착복구공사(연간단가)』 신규 계약업체 선정 전까지 본 공사의 준공 기한을 연기하여 신속한 복구로 주민불편 해소 및 안전사고를 예방하고자 함.

5		조치계획

○ 상기와 같이 도로굴착 복구공사 시행에 따른 공종별 실 시공 물량 증·감 사항을 설계변경 심의위원회 심의 상정 및 감사담당관 일상감사를 실시하고 그 결과를 반영하여 설계변경(제4회) 시행

○ 준공기한 연기 의뢰(도로과 → 재무과)

붙임: 1. 설계변경 내역서(제4회) 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.

3. 방침서 1부.

4. 준공기한 조치 의뢰서 1부.  끝.