문서번호	치수과-25248
결재일자	2022. 12. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
박지수		최연호	12/12
			박상보
협조

- 풍납나들목 리모델링 공사 -

실정보고에 대한 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 12.

한강사업본부

(시설부)

- 풍납나들목 리모델링 공사 -

실정보고에 대한 검토 보고

「풍납나들목 리모델링 공사」관련 서울시설공단 실정보고 사항(PHC말뚝 규격 변경)에 대하여 검토하여 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 풍납나들목 리모델링 공사

○ 위    치 : 서울시 송파구 신천동 255-1 주변

○ 공사기간 : ‘22. 5. 16. ~ ‘23. 4. 30.

○ 공사규모 : 차수벽 철거 및 육갑문 설치, 나들목 내·외부 환경개선

○ 공사비(2차) : 2,839백만원

- 도급비 1,473백만원, 관급비 1,334백만원, 이설비 32백만원

○ 시 공 사 : (주)삼천리이엔지 대표 손원현

○ 공사감독 : 서울시설공단 공사감독1처

□ 추진경위

○ '22.  5. 16. : 착공

○ '22.  8.~ 9. : 설계도서 사전검토

○ '22. 10.~11. : PHC말뚝(∅400㎜) 생산 조회(생산공장 9개소)

○ '22. 11. 28. : 실정보고서 제출(시공사→서울시설공단)

▸ 말뚝 규격 변경(∅400㎜→∅500㎜)

○ '22. 12.  1. : 원설계자 의견 조회(서울시설공단→제일엔지니어링종합건축사사무소)

○ '22. 12.  6. : 원설계자 의견서 및 구조계산서 제출

○ '22. 12.  7. : 실정보고 검토보고서 제출(서울시설공단→치수과)

□ 실정보고 내용

○ PHC말뚝 규격 변경(∅400㎜→∅500㎜)

- 풍납나들목 보행환경 개선을 위해 차수벽(제내지) 철거 및 수문(제외지) 설치를 계획하였으며, 수문 구조물은 PHC말뚝(∅400㎜, 15본)을 기반암(GL -14.3m)까지 근입하여 지지력을 확보하도록 설계하였음

- PHC말뚝(∅400㎜) 생산확인 결과, ∅400㎜ 이하 규격은 수요 부재 등으로 생산이 중단되어 공사 추진이 곤란한 실정임

- 상기와 같은 실정으로 PHC말뚝 규격을 ∅400㎜→∅500㎜로 변경하여 시공하고자 함

‣ PHC말뚝(∅400㎜) 생산조회 결과

연번	회사명	주 소	전화번호	조회결과
1	동진파일	서울 송파구 문정동 충민로 10	02-2047-8700	생산중단
2	동양파일	충남 아산시 염치읍 아산온천로 16-127	02-3770-1805
3	성우파일	충북 영동군 용산면 영동산단로 217	043-744-6350
4	KCC글라스	서울 서초구 강남대로 587	1588-9894
5	영풍파일	충청북도 음성군 금왕읍 덕금로1042	043-878-4460
6	㈜신아	충북 영동군 용산면 한석천작로81	043-744-2962
7	아주산업	충남 아산시 둔포면 관용로 12-11	041-532-0740
8	㈜서산	전남 장성군 동화면 본동로 1033-23	062-950-5000
9	삼일C&S	서울 중구 을지로5길 16	02-311-3300

○ 수량 증·감 현황

구 분	규 격	단 위	당 초	변 경	증․감(△)
PHC 말뚝	∅400㎜, T65㎜	m	225	-	감)	225
사전 천공 후 항타	∅400㎜, T65㎜	m	225	-	감)	225
두부보강	∅400㎜, T65㎜	개소	15	-	감)	15
PHC 말뚝	∅500㎜, T80㎜	m	-	225	증)	225
사전 천공 후 항타	∅500㎜, T80㎜	m	-	225	증)	225
두부보강	∅500㎜, T80㎜	개소	-	15	증)	15

○ 공사비 증·감 현황                                       (단위 : 원)

공 종	당 초	변 경	증․감
기초공사(PHC말뚝)	17,996,415	23,003,166	증)	5,006,751
제 경 비	7,192,925	8,628,981	증)	1,436,056
공 급 가 액	25,189,340	31,632,147	증)	6,442,807
부 가 가 치 세	2,518,933	3,163,214	증)	644,281
도 급 비	27,708,273	34,795,361	증)	7,087,088

□ 검토의견

○ 공사감독자 의견

- 원설계자 검토 의견에 따라 PHC말뚝 규격을 ∅500㎜로 변경하여 시공함이 타당하다고 판단됨

○ 보고자 의견

- PHC말뚝 ∅400㎜ 이하 제품 생산 중단으로 공사 추진이 곤란함에 따라 말뚝 규격을 ∅500㎜로 상향 조정하여 시공하고자 하며,

- 신규비목은 상호 협의한 낙찰률(87.654%)을 적용하여 추후 설계변경시 반영코자 함

□ 조치계획

○ 실정보고 승인 통보(치수과 → 서울시설공단)

○ 물량 증‧감 사항을 반영하여 추후 설계변경 시행

붙임  1. 실정보고 검토의견서(공사감독1처-7164호) 1부.

2. 원설계자 검토의견 및 구조계산서 1부.  끝.