문서번호	시설개선과-27216
결재일자	2022. 12. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설개선과장		체육시설관리사업소장
한원균	양정화	이균형		12/12
				오종범
협 조
	운영기획과장		박대군
	주무관		조근상
	주무관		박희영

2023년 조경 사업 및 시설 유지관리 계획

2022.12.9(금)

체육시설관리사업소

(시  설  개  선  과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2023년 조경 사업 및 시설 유지관리 계획

‘23년 조경분야 사업계획 및 시설물에 대한 유지관리계획을 수립․시행   하여 수목의 건전한 생육과 안전하고 편리한 체육환경을 제공하고자 함

1		추진배경

□ 관련근거

○ 2023년 예산 및 업무계획 (잠실종합운동장․구의야구공원 운영 및 유지관리, 시설 개․보수 예산사업)

□ 추진방향

○ 수목의 건전한 생육 도모 및 특색있는 경관 연출

○ 시설물 위험요소 정비 및 수시․정기 안전점검 실시하여 안전사고 예방

○ 조경관리 자체인력 운영, 상시 유지관리로 쾌적한 환경 조성

2		일반현황

□ 인력 및 주요업무

					체육시설관리사업소장
					시설개선과장					※ ‘23년 현장인력 총 17명(예정) - 공무직 5명, 기간제 12명
녹지 6 양정화			녹지 7 박희영			녹지 7 조근상			녹지 7 한원균			녹지 6 송동옥 녹지 8 김진섭
□조경분야 업무 총괄			□파크골프장 잔디 관리 □효창․구의 인조잔디 관리			□잠실운동장 주경기장 보조경기장 천연잔디 유지관리 업무			□잠실운동장 녹지대, 조경시설물 유지관리 □효창․구의 녹지대 관리			□현장노동자 지도감독 □잔디 및 녹지대 등 현장관리업무

□ 시설 현황

○ 관리시설

단위: ㎥

구분	계	녹지대	(인조)잔디	기타	비고
잠실종합운동장	102,325	55,447	49,518	360	기타: 다목적구장
탄천포지	7,800	-	5,000	1,570	기타: 관리실, 온실 등
효창운동장	12,700	3,000	9,600	-
구의야구공원	24,247	11,832	12,192	223	기타: 관람석

○ 기타시설

- 생활체육시설: 야외운동기구 11종 18점(허리돌리기, 철봉 등)

- 조경시설물: 16종 292점(파고라, 야외탁자 등)

3		’22년 사업 실적

□ 잠실운동장: 위험수목 전지공사 등

위험수목 전지공사(67백만원, 전․후)			녹지대 정비공사(28백만원, 전․후)

다목적구장 유지보수공사(8백만원, 전․후)			휴게시설 정비(3백만원, 전․후)

4		’23년 주요 사업

□ 은행나무 접목 시범사업(비예산, 자체시행)

○ 목적 : 매년 발생하는 은행열매 악취를 해소하기 위한 접목 시범사업

- 기 간 : '23. 2 ~ 12.      - 위 치 : 제3풋살장 옆 암나무 3주

- 방 법 : 전문가 자문아래 암나무에 수나무 가지 접목 직접 자체시행

- 절 차 : 2월 접수채취, 3월 접목, 4월~11월 활착관리, 12월 사업평가 및 분석

□ 효창운동장 인조잔디 교체사업(812백만원, 공사발주)

○ 목적 : 노후되어 훼손된 효창운동장의 인조잔디를 교체하여 시민 편의제공

- 기 간 : '23. 1 ~ 3.       - 위 치 : 효창운동장 (면적: 9,600㎡)

- 방 법 : 관급자재(인조잔디) 구매·설치 및 폐기물 처리 용역 시행

□ 수목 가지치기 및 녹지대 정비사업(110백만원, 공사발주)

○ 목적 : 대형수목 가지치기로 사고예방 및 훼손녹지대 정비로 경관향상

○ 내용 : 녹지대 수목식재, 소나무 및 경계외곽 가지치기, 중앙도로변 사각전지 시행

- 기 간 : '23. 2 ~ 9.    - 위 치 : 잠실종합운동장 내 수목, 녹지대

- 방 법 : 시기별 적합한 조경공사(가지치기 및 녹지대 정비) 발주 시행

5		관리 개요

□ 관리기간: 2023. 1월 ~ 12월

□ 유지관리 내용

○ 위험수목 전지 및 녹지대 정비공사 등 전문업체에 의뢰 시설개선공사를 시행하고 자체 인력을 운용하여 안전하고 쾌적한 조경시설 유지․관리 시행

○ 상시 순찰, 주기적인 점검으로 안전위해 요소 차단 및 즉시 정비

○ 조경시설 관리 매뉴얼, 연중 작업일정에 따른 체계적인 유지관리

6		세부추진계획

□ 조경 유지관리 사업 및 유지관리 추진

구분	연번	사업명	사업개요	예산액 (백만원)	발주 시기	준공 시기
시설공사				942
	1	은행나무 접목 시범사업	- 암나무 3주 선정 접목 실시	-	2월	12월
	2	효창운동장 인조잔디 교체공사	- 노후인조잔디 교체 9,600㎡	812	1월	3월
	3	잠실종합운동장 위험 수목 전지공사	- 강전지 170주, 사각전지 170주 등	80	2월	9월
	4	잠실종합운동장 녹지대 정비공사	- 교목식재 10주, 관목식재 3,000주 등	30	3월	5월
	5	잠실 주·보조경기장 등 잔디보식공사	- 잔디보식 400㎡ 등	20	6월	10월
직영관리				543
	1	계절별 꽃묘 및 초화 구매․식재	국화 등 계절별 꽃묘 5,000본 식재	20	1월	12월
	2	파크골프장 유지관리	잔디깎기, 제초, 방제, 잔디식재 등	10	1월	12월
	3	풋살경기장 유지관리	제1․2․3 풋살경기장 브러싱 등	10	3월	10월
	4	잔디, 수목 병해충방제 수간주사	흰불나방 등 해충 방제용 수간주사	30	3월	4월
	5	잠실 운동장 잔디, 녹지대 등 유지관리(연중)	- 제초, 방제, 시비, 관수, 식재 전지 등 - 직영관리(공무직5명,기간제14명)	473	6월	10월

□ 수시․정기 점검 실시

○ 점검 종류 및 시기

- 일 상 점 검 : 각 시설 담당자 현장(육안) 점검

- 정기안전점검 : 계절별 매년 상(5월) ‧ 하반기(11월) 정기 안전점검

- 특별안전점검 : 명절(설날, 추석), 여름철 우기 및 태풍 대비 등 안전점검

○ 점검 방법

- 연중 시설개선과 총괄 점검 계획에 따라 점검 시행

- 각 담당별 세부 점검표에 의거 정기적인 순찰 점검 및 수시 점검

- 경미한 사항은 즉각 조치하고 예산 및 기간이 소요되는 사항은 공사시행 조치

○ 점검 및 관리 체계

대 상	점검 분야	점검 대상	관리자			비고
			총괄	담당	현장담당
잠실종합운동장 효창운동장 구의야구공원	수목 및 녹지대	녹지대, 조경시설 등	양정화	한원균	송동옥 김진섭
	천연잔디	주경기장, 보조경기장		조근상
	인조잔디	인조잔디 경기장		박희영

○ 점검내용 : 녹지대내 고사목, 운동기구 파손 여부 등 점검(붙임1)

□ 체계적인 시설 유지관리

○ 잔디 및 녹지대 등 유지관리 매뉴얼에 따른 체계적 관리(붙임2,3)

<< 조경관리 연간 작업 일정 >>

분야	사 업 명	작업시기 및 횟수												연간 횟수	비고
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
녹지대	전정 (상록수)													1~2
	전정 (낙엽수)													1~2
	전정 (관목)													1~3
	시비(비료주기)													1~2
	병충해 방제													3~4
	제초, 풀베기													3~4
	관수작업													수시
	수간보호													1
	지주목 보수													1	태풍
	월동작업													1
잔디	잔디깍기													10~12
	뗏밥주기													1~2
	시비													1~3
	병해충방제													3~4
	관수 작업													수시
	제초													3~4
편의 시설	도색작업													1	적기
	시설보수													수시
인조 잔디	브러싱 작업													휴관일
	충진재 교체													휴관일

7		행정사항

□ 사업별 별도 세부계획 수립하여 사업 추진

□ 파크골프장 및 풋살경기장 운영관리 협조

□ 연중 지속적인 점검 및 체계적인 유지관리 시행

붙임 : 1. 조경시설물 점검 매뉴얼 1부.

2. 잔디관리 매뉴얼 1부.

3. 녹지대 및 파크골프장 유지관리 매뉴얼 1부.  끝.