문서번호	급수운영과-38048
결재일자	2022. 12. 13.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
급수관리팀장		급수운영과장	중부수도사업소장
이훈재		김상웅	12/13
			장청락
협 조
	주무관			성영한

2022년 포장도로 굴착복구공사 설계변경 계획(안), 4차

(2022년 중부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사)

2022.  12.  13. (화)

중부수도사업소

(급수운영과)

포장도로 굴착복구공사 설계변경 계획(안)
중부수도사업소	급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수관리팀장(담당) :이훈재☎2160

『2022년 중부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속)』의 시공물량 증감에 따른 설계변경을 통하여 굴착복구공사 업무에 만전을 기하고자 함.

□ 추진 근거

○ 공사계약일반조건 제19조 및 서울특별시 공사계약특수조건 제12조(설계변경 등)

○ 2022년 상수도사업 계약심사 추진계획(안전조사과-719호, 2022. 1. 25.)

※ 제3차 설계변경 시행(급수운영과-37110호, 2022. 12. 1.), 배급수관 정비공사구간

☐ 공사 개요

○ 공 사 명: 2022년 중부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속)

○ 공사내용: 아스팔트 133.49a, 콘크리트 2.54a, 보도블록 14.85a, 아스팔트 표층 131.44a

○ 공사기간: 2022. 5. 4. ~ 2023. 6. 30.

○ 계약금액: 2,925,408,000원(1차수 1,717,223,000원)

○ 업 체 명: 주식회사 신작로  대표 김양호

☐ 설계변경 계획(안)

○ 변경내용: 물량 증·감 및 차수 변경

구분	당 초		변 경		증·감		비고
	물량	금액	물량	금액	물량	금액
도급비	282.32a	2,925,408,000	289.48a	2,925,408,000	7.16a	-	금액 변경 없음

○ 차수 변경내역                                                 (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총부기 계약금액	2,925,408,000	2,925,408,000	0
1차수 (2022년)	1,717,223,000	2,085,160,000	367,937,000	1~4차 기성금액
2차수 (2023년)	1,208,185,000	840,248,000	-367,937,000

- 물량 세부 변경내용

구 분	당 초	변 경	증·감		비고
아 스 팔 트(a)	133.49	145.01	증)	11.52
콘 크 리 트(a)	2.54	4.43	증)	1.89
보 도 블 록(a)	14.85	13.21	감)	-1.64
아스팔트 표층(a)	131.44	126.83	감)	-4.61

※ 물량 증·감에 따른 설계변경(계약금액 변경 없음)

○ 변경 사유: 현장 여건 변경 등에 따른 포장복구 계약 물량 증감 발생

☐ 행정 사항

○ 제4차 설계변경 심의(심사): 사업소 자체 시행

- 일시: 2022. 12. 13.(화)

- 구성: 위원장(1): 급수운영과장, 위원(5): 공사팀장 및 시설6급 주무관

- 내용: 설계변경의 적정성 및 신규공종 단가적용, 물량 증감 등 검토

※ 단가계약공사는 도급비 증액 시 최종 설계변경만 본부(안전조사과) 심사의뢰

<참고> 본청 계약심사과 심사대상

·계약금액이 20억원 이상 공사의 설계변경에 따른 1회 증액분 또는 2회  이후 누적     증액분이 해당 계약금액의 10퍼센트 이상인 설계변경 공사

·근거: 서울특별시 계약심사 업무처리 규칙(서울특별시규칙 제4461호, 2022. 1. 13)

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.

3. 설계변경 관련자료 1부.  끝.