과  장

12/13

심사자

유세종

설계자

유형근

설    계

심    사

결    재

이동욱

2022년 12월  일

2022년 12월  일

변  경  설  계  서  (2차)

설계서  2022년 종로,성북구 관내 상수도시설물 설치및 보수공사 설계변경(2차)

구               분

당 초

변 경

증·감

비     고

*************************

*************

*************

****

*

*

*

******************

*************

*************

****

*****************

***********

***********

****

*

*************

*************

****

관 급 자 재 비

별 도

별 도

공사개요	관 경	당 초	변 경	비 고
	노후밸브교체	195개소	140개소	감) 55개소
	밸브실정비	196개소	114개소	감) 82개소
	소화전 보수	69개소	30개소	감) 39개소
	기타 시설물 보수 및 환경정비	1식	1식	-

붙 임 : 변경설계서(1차) 1부.  끝.