아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	68m 고가사다리차('21년 구매) 검사관련 일정 변경 보고(알림)

1. 관련근거

가. 안전지원과-39020(2022.12.5.)호 "68m 고가사다리차('21년 구매) 검사관련 관계자 회의 결과보고(알림)"

나. 소방행정과-21438(2022.4.6.)호 "계약변경 보고(알림) 2021년 68미터 고가사다리차 제조 구매"

다. 안전지원과-7815(2021.4.28.)호 "소방차량(68m 고가사다리차) 소방산업기술원 검사 의뢰"

2. 2021년 4월 계약체결 되어 2022.12월 노원소방서 배치 예정인 외산(독일)구매 68m 고가     사다리차 납품검사를 다음과 같이 변경 보고(알림) 하오니, 관련 기관 및 부서에서는         원할한 검사가 진행될 수 있도록 적극 협조 바랍니다.

가. 변경사유 : 68m 고가사다리차 운송(입항일정) 지연

○ 입항일 : 2022.12.12.(월) ⇒ 2022.12.19.(월)

나. 검사일정 ※ 차량 입항일정에 따라 변동될수 있음.

○ 평택항 입항 (예정) : 2022.12.19.(월)

○ 차량운행을 위한 세관업무 등 사전절차 진행 : 2022.12.19.(월) ~ 12.20.(화)

⇒ 맥스테크코리아 : 정인수 대표

○ KFI 검사추진 : 2022.12.21.(수) ~ 12.23.(금) / 서울소방학교(실화재훈련장)

⇒ 한국소방산업기술원 : ******

※ 규격조사반************ 검사 참관 : 20222.12.22.(목)

○ 차량운용자 교육 : 노원소방서 운용요원 6명 (1,2,3 팀 각 2명) / 본부 규격조사반

- 1차교육 : 2022.12.24.(토) ~ 12.27.(화) / 서울소방학교(실화재훈련장)

⇒ 맥스테크코리아 : 정인수 대표

- 2차교육 : 2023.1.9.(월) ~ 1.12.(목) / 노원소방서 등

⇒ 독일 마기루스 엔지니어

다. 검사관련 추진사항

○ 맥스테크 코리아 : 소방산업기술원 차량검사 시 차량규격서 적용을 위한 EN규정,           로드아이 규정 등 보완자료 추가제출 및 검사 물품 협조

○ 소방재난본부 : KFI 검사 및 차량 교육 시 규격조사반 등 입회

○ 노원소방서 : 소방검사 참관 및 교육대상자 선정(교육) ※ 세부일정 유선협의

- 1차교육 : 2022.12.24.(토) ~ 12.27.(화) / 서울소방학교(실화재훈련장)

- 2차교육 : 2023.1.9.(월) ~ 1.12.(목) / 노원소방서 등

- 대   상 : 노원소방서 차량 운용요원 6명 (1,2,3 팀 각 2명)

⇒ 노원소방서 자체 교육 계획 수립 및 추진

3. 행정사항

가. 노원소방서 : 차량 교육대상자 선정 및 사전 교육

- 68m 고가사다리차가 기 배치된 영등포, 송파에서 사전교육 등 실시

나. 서울소방학교 : 차량검사 장소 협조

다. 검사 및 교육 참석 직원에 대하여 규정에 맞게 수당(초과근무, 여비 등) 지급

라. 검사 및 교육 참석자는 코로나19관련 개인위생관리 철저.

붙임  1. 68m 고가사다리차 규격서 1부.

2. 68m 고가사다리차 매뉴얼(별도 송부) 1부.

3. 독일 엔지니어 교육이행 확약서(압축) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	한국소방산업기술원원장, 맥스테크코리아 정인수대표, 서울특별시소방학교장(교육지원과장), 광진소방서장(소방행정과장), 노원소방서장(소방행정과장)
주임	김성환		장비관리팀장	권기백		안전지원과장	12/13
이홍섭
협조자	조정관	이광섭
시행	안전지원과-39774	(	2022.12.13	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52, 소장재난본부 안전지원과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1612	/전송	02-3706-1619	/	ksh0465@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)