문서번호	교통지도과-35619
결재일자	2022.12.13
공개여부	비공개(5)
방침번호

주무관		주차기획팀장		교통지도과장		안전건설교통국장
김민주		김진철		이문호		12/13
						신용철
협조

공영주차장 전기차 충전시설 설치 공사 준공기한 연장 검토 보고

- 공영주차장 전기차 충전시설 설치 공사 -

준공기한 연장 검토 보고

[교통지도과]

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [√] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [√] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [ ] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [ ]
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

「공영주차장 전기차 충전시설 설치 공사」 준공기한 연장 검토 보고

우리 구에서 시행중인 「공영주차장 전기차 충전시설 설치 공사」의 준공기한을 연장하고자 함.

Ⅰ		사 업 개 요

□ 계 약 명: 공영주차장 전기차 충전시설 설치 공사

□ 계약기간: 2022. 10. 17. ~ 2022. 12. 15.

□ 계약업체: 주식회사 윤리

□ 계약금액: 금 161,746,800원 (시비-특별조정교부금)

Ⅱ		준공기한 연기 사유

□ 한국전력공사의 계통연계 지연으로 인해 준공 기한 연기 필요

Ⅲ		준공기한 변경

□ (당초)2022. 12. 15. → (변경)2022. 12. 23.

붙임  1. 준공기한 연기의뢰서 1부

2. 변경계약 합의각서 1부.  끝.