문서번호	교량안전과-35594
결재일자	2022. 12. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
윤세희		김성권	12/14
			조현석
협조

- 천호대교 정밀안전점검 및 실태조사 용역 - 설계변경(자문비 정산 등) 검토 보고

2022.12월

안전총괄실

(교량안전과)

- 천호대교 정밀안전점검 및 실태조사 용역 - 설계변경(자문비 정산 등) 검토 보고

「천호대교 정밀안전점검 및 실태조사 용역」에 대하여 자문비 등을 반영한 설계변경을 검토하고, 그 결과를 보고드림

□ 관 련 근 거

○ 서울특별시 위원회 수당 및 여비 지급 조례 시행규칙 제2조(수당의 종류 및 지급액)

○ 천호대교 정밀안전전검 및 실태조사 용역 중간보고회(자문) 개최 결과보고(교량안전과-31288, 2022.10.06)

○ 천호대교 정밀안전전검 및 실태조사 용역 중간보고회(자문) 개최 결과보고(교량안전과-31288, 2022.10.06)

○ 천호대교 정밀안전전검 및 실태조사용역 관련 추가과업 요청(교량안전과-27141, 2022.07.21)

□ 용 역 개 요

용 역 명	과 업 기 간	용 역 사	용역비 (천 원)	비 고
천호대교 정밀안전점검 및 실태조사 용역	′22.04.06. ∼′22.12.31.	(주)한국국토안전연구원	104,445

□ 보 고 내 용

구 분	수 량			비 고
	당 초	변 경	증·감
***	** **********	** *********	***********	***************
*********	*	**** ********	***********	*** **********
*****	** **********	** **********	***********	****** *****

○ 설계변경 사유

- 중간 및 최종 자문회의 참석 위원들에게 자급하는 자문수당 실정산

- 추가과업 요청한 교각부 염화물함유량시험의 시험비 정산

○ 정산내역

구 분	당 초	변 경	증·감
****	***********	***********	************
****	**********	**********	************
*****	*********	*********	************

○ 설계변경 내역

※ 증액되는 부분은 본용역의 낙찰차액(16,623,000원) 사용 정산

□ 조 치 의 견

○ 위 보고내용을 반영하여 설계변경을 시행하고, 용역 준공(정산)코자 함

따로붙임 : 1. 변경내역서 1부.

2. 용역 중간보고회(자문) 개최 결과보고 1부.

3. 용역 최종보고회(자문) 개최 결과보고 1부.

4. 천호대교 정밀안전점검 및 실태조사용역 관련 추가과업 요청 1부.  끝.