실정보고 검토서

[조경공사 수량 정산 설계반영, 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사]

공사명	올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사(조경)
공사개요	· 위 치 : 올림픽대교 남단(송파구 풍납2동) · 규 모 : 신설 1.6㎞, 이설 1.3㎞ · 공사기간 :‘16.04.01.~’22.12.31. · 도 급 비 : 502억원				· 시 공 사 : 대보건설(주) 외 2개사 · 감 리 단 : ㈜이산 외 2개사 · 설 계 사 : ㈜대한콘설탄트
실정보고 건명	조경공사 수량 정산 설계반영[올대감 제2022-186호(22.12.16.)]
실정보고 사유	- 관계기관(한강사업본부, 서울시설공단) 협의의견 및 현장여건을 반영한 준공전 수량정산 보고 협의내용 및 현장여건을 설계에 반영하고자 함. · '22.10.17. : "풍납동나들목 리모델링 공사"와 관련 한강둔치 복구에 대한 간섭사항 대책회의(한강사업본부) · '22.11.21. : 현장 수시점검시 점검사항 및 요청사항(서울시설공단)
건설사업관리단 검토의견	- 관계기관(한강사업본부, 서울시설공단, 송파구)의 협의내용 및 현장여건을 반영한 사항으로 설계반영하여 조경공사를 추진함이 적절할 것으로 사료됨.
변경(안)	****** ********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** ********************************************************* ******** ********************************************************************************************************************************************
예산조치계획	당초 사업비 범위 내 시행 가능
추가 행정절차 이행 필요여부	제2차 조경분야 설계변경 소위원회 시 결정된 계약단가에 대한 물량 증감사항으로 행당없음
발주처 검토의견	책임건설사업관리기술자의 검토의견이 타당한 것으로 판단되므로 실정보고 승인 통보하여 추후 설계변경 반영하고자 함.
결재	주무관	김현곤	공원시설과장	代권동현		방재시설부장	전결 12/16
							代손창익
	주무관	김혜연