문서번호	기전과-29561
결재일자	2022. 12. 16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	북부도로사업소장
조계진		이상연	12/16
			이도헌
협조

2022년 노후 교통신호시설 교체공사(2구역)

설계변경(정산) 검토 보고

2022. 12

북부도로사업소

(기전과)

2022년 노후교통신호시설 교체공사(2구역)」

설계변경(정산) 검토 보고

2022년 노후교통신호시설 교체공사(2구역)작업이 완료됨에 따라 책임감리사에서 설계 변경서류가 접수되어 검토하고 이를 보고함

□ 관련근거

○ 202210170AB(2022. 11. 1) 2022년 노후 교통신호시설 교체공사(2구역)계약
○ 2022.12.15- 2022년 노후교통신호시설 설계변경 서류제출(책임감리사)

□ 사업개요

○ 사 업 명: 2022년 노후 교통신호시설 교체공사(2구역)

○ 계약기간: 2022.11.4 ~ 2022.12.30일

○ 계약업체: **************

○ 계약금액: ********************************

○ 사업대상: *******************

□ 설계변경 추진내용

○ 변경금액

(단위: 원)

구 분	변경 전	변경 후	증 · 감	비고
공급가액	***********	***********	***********	**
부가가치세	*********	**********	**********	**
합 계	***********	************	***********	**

○ 변경사유

- 현장여건(실정보고)에 따른 물량변경사항을 반영하고 제경비및 간접비등을       정산하여 준공 처리하고자 설계변경.

○ 예산과목

- 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 교통사업특별회계, 교통신         호기 신설 및 보수, 시설비

□ 검토의견

☞ 책임감리사

- 현장상황에 따른 물량변경및 증빙자료에 의한 원가계산서의 간접비, 제경비       등 정산에 따른 금액 조정발생으로 설계변경이 요구됨

☞ 담당보고자

- 책임감리업체(주) 건호엔지니어링에서 제출한 설계변경 검토보고서를 검토       한결과 적합하여 설계변경(정산)을 시행하여 준공처리하고자 함.

붙임:  1. 설계변경 제출서류(감리사) 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 검증확인서 1부.  끝.