문서번호	기전과-29306
결재일자	2022. 12. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
오태환		12/19
		代호정오
협조

2022년 교통사고 잦은 곳 교통신호기 공사 설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 12.

강 서 도 로 사 업 소

[기 전 과]

2022년 교통사고 잦은 곳 교통신호기 공사

설계변경 검토보고

2022년 교통사고 잦은 곳 교통신호기 공사와 관련하여 감리업체가 제출한

설계변경에 대하여 내용을 검토하고 그 결과를 보고 함.

□ 관련근거

○ 2022년 교통사고 잦은 곳 교통신호기 공사 설계변경 요청서 제출

- 문서번호 대영유비텍(주) GE22A-12-37호(2022. 12. 16.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2022년 교통사고 잦은 곳 교통신호기 공사

○ 공사위치 및 내용

- 강서구 강서구청입구 : 신호기(차/보) 이설 3본

- 영등포구 영등포전화국 교차로 : 후방신호기(차) 추가 설치 4조

- 영등포구 양평동교차로 : 신호기(차/보) 신·이설 4본

- 구로구 신애전자 앞 : 신호기(보) 이설 2본

- 양천구 신월동교차로 : 신호등주 부착대 길이 연장

○ 계약금액 : 158,690,000원

○ 공사기간 : 2022. 8. 17. ∼ 2022. 12. 22.

○ 계약업체 : (주)삼천리이엔지 대표 손원현

○ 감리업체 : 대영유비텍(주) 대표 조근환

□ 설계변경 사유 및 내용

○ 설계변경 사유

- 실정보고 승인에 따른 내역서 변경 및 실제 시공물량 정산

- 간접노무비 및 보험료 등 제경비 정산

- 폐기물 처리비 정산

○ 설계변경 내용

공 종	주요 변경내용	변경금액
교통신호제어기	설치물량 감소 28(29→1)	감) 5,066천원
교통신호등	설치물량 증가 9(28→37)	증) 2,057천원
음향신호기	설치물량 증가 28(22→50)	증) 5,266천원
신호등주	설치물량 증가 12(62→74)	감) 57천원
신호케이블	설치물량 증가 212(1,313→1,525)	증) 2,468천원
굴착 및 배관	설치물량 감소 14(200→186)	감) 2,003천원
그 외 공종	맨홀보수 외 3개 공종 설치물량 감소 12(103→91)	증) 1,341천원
간 접 비	간접노무비 및 보험료 등 제경비	감) 17,976천원
폐기물처리비	실제 처리 물량 반영	증) 520천원
합 계		감) 13,450천원

※ 상세내용 및 내역 붙임 설계변경 참조

□ 설계변경금액(총괄)

구 분	당 초	변 경	증·감액
도급비	158,690,000원	145,240,000원	감) 13,450,000원

□ 조치의견

○ 실정보고 승인내용 반영에 따른 내역서 변경 및 실제 시공물량 정산,

간접노무비 및 보험료 등 제경비 정산, 폐기물처리비 정산 등 감리업체의

설계변경 내용이 적정하여 이를 승인하고 설계변경을 시행하고자 함

붙임  2022년 교통사고 잦은 곳 교통신호기 공사 설계변경 요청서 제출 1부.  끝.