문서번호	도시경관과-21854
결재일자	2022. 12. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		광고물개선팀장	도시경관과장		도시관리국장
남성훈		이성철	임동철		12/30
					代임동철
협 조
						계약팀장		심은진

	강동을 새롭게, 구민을 신나게!

주민센터 LED 전자현수막(전광판) 제작 설치

계약기간 연장 검토 보고

2022. 12. 29.

도시관리국

(도시경관과)

사전 검토사항

☞ 해당사항에‘■’표시 후 필요 시 괄호 안에 검토내용을 기입하시기 바랍니다.

검 토 항 목		검 토 여 부
법규 검토	관련법규	□ 검토 완료( )	■ 해당 없음
	공직선거법	□ 검토 완료	■ 해당 없음
재원확보		□ 국비 □ 시비 ■ 구비 □ 민자 유치 □ 기타( )	□ 비예산
주민의견 반영 및 참여방안		□ 설문조사 □ 공청회 □ 토론회 □ 공모 □ 기타( )	■ 해당 없음
갈등관리		□ 이해관계자 간 갈등 발생 가능 □ 민원발생 가능 (갈등요소: )	■ 해당 없음
전문가 자문		□ 이행 완료 □ 예정	■ 해당 없음
협업 협치	타 기관 및 단체	□ 중앙부처 □ 서울시 □ 타 지자체 □ 투자출연기관 □ 민간단체 □ 구의원 업무공유 □ 기타( )	■ 해당 없음
	관 련 부 서	■ 협업 필요(해당부서: 재무과)	□ 해당 없음
추진절차		■ 일상감사 □ 투자심사 □ 용역심사 □ 민간투자사업 심의 □ 타당성 검토 □ 공유재산 심의 □ 의회 심의 □ 기타 위원회 심의 등	□ 해당 없음
홍보방안		□보도자료 제공 □ 기자 설명회 □ 구 소식지 □ SNS □ 기타( )	■ 해당 없음
기타 고려사항		□ 인권영향평가(구민 인권보장 및 증진) □ 아동친화 및 아동영향평가 □ 교육영향평가(학생 안전과 수업권 확보) □ 여성친화 및 성별영향 □ 건강친화요소 □ 환경인지 □ 사회적 약자 배려 □ 타 기관 사례 파악 비교 ■ 안전대책 □ 유지관리비용 □ 시장조사 □ 미래행정 수요예측 □ 고용효과 □ 행사의전 ■ 바른 우리말(행정순화어)

- 주민센터 LED 전자현수막 제작 설치 -

계약기간 연장 검토 보고

「주민센터 LED 전자현수막(전광판) 제작 설치」와 관련하여 최근 한파로 인해 안전사고 등을 방지코자 계약기간을 변경하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

1		관련근거

□ 주민센터 LED 전자현수막 제작 설치 계획 [도시경관과-15515호(2022.10.18.)]

2		사업개요

□ 계 약 명 : 주민센터 LED 전자현수막(전광판) 제작 설치

□ 계약금액 : 186,022,100원

□ 계약기간 : 2022.11.25.~2023.01.13.(50일)

□ 설 치 사 : ㈜엘이디플러스 (대표자: 권의중)

□ 공사내용 : 강일동, 길동, 상일1동, 암사2동 주민센터 전자현수막 설치

□ 추진 경위

○ 2022.10.08: 주민센터 LED 전자현수막 설치 계획

○ 2022.11.02: 주민센터 LED 전자현수막(전광판) 제작 설치 입찰공고

○ 2022.11.25: 계약 및 착수

○ 2022.12.15: 설계변경 방침

3		변경내용

구 분	변경 전	변경 후	비고
계약기간	’22.11.25 ~ ‘23.01.13	‘22.11.25 ~ ‘23.01.20	증 7일

□ 세부일정(안)

주민센터 명	변경 전	변경 후	비고
강일동주민센터	’23.01.03 ~ ’23.01.04	’23.01.10 ~ ’23.01.11
길동주민센터	’23.01.05 ~ ’23.01.06	’23.01.12 ~ ’23.01.13
암사2동주민센터	’23.01.09 ~ ’23.01.10	’23.01.17 ~ ’23.01.17
상일1동주민센터	’23.01.11 ~ ’23.01.12	’23.01.18 ~ ’23.01.19

※ 기상상황에 따라 변동될 수 있음

4		검토의견

□ 최근 한파로 인해 인원 및 차량 등 장비사용에 어려움이 있으며, 안전사고 등을 예방하기 위해 설치 일정을 변경코자 함

□ 지체상금 미부과

5		행정사항

□ 재 무 과 : 계약기간 연장 처리

□ 주민센터 : 세부일정 통보

붙임: 계약기간 변경 요청 공문 1부.  끝.