사업현장 안전관리 강화를 통한 무재해 달성 노력
지표정의
사업현장 안전관리 강화를 통한 안전사고 예방노력과 공정․상생협력을 위한 노력을 평가한다.

❙	세부평가내용
①	성과 달성을 위한 추진계획은 구체적이고 적정하게 수립되었는가?
②	성과 달성을 위한 추진계획이 적절하게 집행되었는가?
③	비계량적 성과는 적정한 수준인가?
④	성과의 환류활동은 적절하게 수행되었는가?

평가군	시공군	평가 대상 조직	건설사업처	처·실·단·원장	건설사업처장 조 대 원	3410-8900
				작 성 자	견적발주부 권 효 정	3410-8920
					건설사업부 오 희 윤	3410-8907
					건축공사부 정 대 웅	3410-8928
					도시건축부 박 동 휘	3410-8937
					단지토목부 최 승 민	3410-8945

(빈 페이지로 두고 작성)

1		성과 달성을 위한 추진계획은 구체적이고 적정하게 수립되었는가?

대내외 경영여건 분석

가

전년도 성과 분석	잘한점		안전한 건설환경	∙ 현장근로자 교육 및 심장자동충격기, 안전 CCTV등 안전장비 설치 ∙ 산업안전보건관리비 초과사용 허용 방침 수립으로 사고 예방 및 안전의식 고취
			스마트 안전장비	∙ 스마트 안전턱끈 시스템 도입으로 중대재해 예방 및 위급상황 대처
			코로나19 예방노력	∙ 지속적인 선제검사를 비롯한 적극 방역 참여 ∙ 코로나19 방역을 위한 공공기관의 선도적 역할 수행
	미흡한점		안전관리 강화 노력	∙ 안전사고 발생에 따른 적극적, 다각적 안전관리 방안 검토 요구
			개별 현장 안전대책	∙ 건설 현장별 자체적인 안전관리 방안 적용 검토 요구
경영 여건	대내여건		강점	∙ 건설현장 안전관리 관련 높은 현장대응 민감성 ∙ 건설안전 사고 관련 현장별 즉각 시행 및 조치 가능
			약점	∙ 중대재해 발생시 대외적 인지도 저하 우려 ∙ 신규사업 다각화에 따른 도심지 공사 증가 및 안전사고 유발요인 증가 ∙ 현장 안전점검 강화에 따른 현장감독부서의 업무 증대
	대외여건		기회	∙ 광주 신축 아파트 건설 중 붕괴사고로 인한 경각심 고취 ∙ 재해 발생 방지에 대해 자체적으로 예방 및 운용이 가능 ∙ 공정경제, 상생문화 확산으로 적정공사비 지급요구 ∙ 신공법, 스마트 기기 등의 도입으로 건설안전장비의 품질 향상 및 시스템 개선
			위협	∙ 시중금리 및 원자재값 승승에 따른 건설투자 위축 ∙ 안전관리 강화에 따른 안전관리비용 상승
	정부정책		제도	∙ 중대재해처벌법 및 안전관련 제도 증가 - 국토교통부 「건설공사 안전관리 업무수행지침」 안전관리비 항목 신설
시사점		∙건설근로자의 안전관리 강화 및 도심특화 안전관리 실천 노력 추진방향 1 ∙안전우수 공기업으로 공사의 위상 강화 노력 추진방향 2 ∙자체적인 안전관리 점검계획 수립 노력 추진방향 3 ∙공정거래 문화 조성으로 공사에 대한 신뢰도 향상 노력 추진방향 4 ∙협력업체와 상행협력 강화 노력 추진방향 5

2		성과 달성을 위한 추진계획이 적절하게 집행되었는가?

2.1		건설근로자의 안전관리 강화 및 도심 특화 안전관리 실천 노력

□ 흙막이 공사 중대재해예방 및 도심 공사장 외부도로 안전관리 강화 노력

배경 및 현황		문제점		추진방향 및 기대효과
∙ 공사장 내 주요 중대재해 관련 사전 모니터링 기준 미흡 ∙ 신규사업 다각화로 도심지 공사가 증가함		∙ 안전관리의 사각지대 발생 가능 ∙ 인근 주택가 및 학교 등에 안전사고 유발요인 발생 가능		∙ 계측관리 체계화 기준 수립 및 사전 모니터링 강화 ∙ 안전관리 강화

추진

실적

❍ 공사현장 내 _ 흙막이 공사장 안전사고 제로화를 위한 계측시스템 체계화[단지토목부-3809호]

개선 전

흙막이 공사장 안전사고 제로화 방안 수립

추진 성과 및 효과

∙ 지반침하, 싱크홀 등 공사장 안전사고 예방을 위한 우리공사의  계측 관리 기준 부재

∙ 일관된 기준 없이 현장별로 계측관리를 진행하여 안전관리 사각지대 발생 가능

∙ 계측시스템 체계화 방침 수립(단지토목부-3809호)

[계측관리 기준]

위험사항	계측항목	계측빈도			설치간격
		굴착전	굴착중	굴착후
지반침하, 싱크홀	지중경사계	1회/일 (3일간)	2회/주	1회/주	각면 배치
	지하수위계	1회/주	1회/일 2회/주	1회/주	0~50m
가시설 붕괴	하중계	1회/주	2회/주	1회/주	0~50m
	변형률계	3회/일 (1일간)	2회/주	1회/주	0~50m
주변 지반 침하	지표침하계	1회/일 (3일간)	2회/주	1회/주	0~50m (4면 이상)
주변 구조물 (건물, 옹벽 등) 균열 ※ 굴착영향범위 내 시설물 존재 시	건물경사계	3회/일 (1일간)	2회/주	1회/주	0~50m (4면 이상)
	균열측정계	1회/주	2회/주	1회/주

[필수계측 사항 지정]

‣ 지반침하, 싱크홀, 가시설 붕괴 관련 계측기 설치 필수화

※ 지하수위계(싱크홀 관련): 자동계측을 원칙으로 하여 실시간 모니터링

∙ 안전사고에 대한 체계적 계측관리를 통해 공사장 내 위험징후를 신속히 발견·대처하여 사고예방 가능

∙ 필수 계측항목 및  계측빈도, 설치위치 등을 구체화하여 안전 관리 사각지대 최소화

∙ 향후 우리공사 현장의 체계적이고 일원화된 계측관리 가능

❍ 공사현장 외 _ 도심지 공사 시 외부도로 안전관리 강화

∙ 보행자 및 통학생 안전확보 대책추진(등촌동 어울림플라자 건설공사)

기존 현황		보행자 및 통학생 안전확보 대책 추진		추진 성과 및 효과
∙ 도심지 내 초등학교 및 보도 와 연접한 현장특성으로, ∙ 통학생 및 보행자에 대한 안전우려 민원 다수 발생		∙ 중점안전관리구역 설정하여 구역별 안전대책 수립 ∙ 보행자를 위한 안전통행로 설치(안전천장 및 난간, 안전경고등 등) ∙ 통학 학생 보호를 위한 등하교시간 차량출입 통제 ∙ 공사 안전관리를 위한 주민 참여형 민관협의체 구성		∙ 도심지 보행자의 통행안전 및 통학생 안전학습권 확보 ∙ 향후 도심지 내 유사사례 발생 시 보행안전대책으로 활용 가능

∙ 공사장 외부도로 안전표지판 설치 강화를 통한 교통안전 확보 [단지토목부-3809호]

신규

개선 전

공사장 외부도로 안전표지판 설치 강화

추진 성과 및 효과

∙ 도심지 공사 외부도로 점용 시 신호수 배치 또는 A형 입간판 설치만으로 안전관리

∙ 공사장 LED 안전표지판 시범 운용 방침수립(단지토목부-3800호)

- 외부도로 점용 수반현장에 LED 안전표지판 시범운용을 통해 주·야간 시인성 강화

LED 시선유도장치	LED 점멸 방향유도등

‣ 등촌동어울림플라자 건설공사에 시범운용 예정(’23.하반기)

∙ 우리공사의 공사현장으로 인해 유발될 수 있는 외부도로의 교통사고 예방

∙ 외부 교통 불편 최소화를 통한 민원발생 방지

∙ 사천빗물펌프장 공사장 외부휀스로 인해 외부 도로 운전자 시야 차단 등에 따른 불편 및 사고 우려 민원 발생

∙ 사천빗물펌프장 토공사 현장외부도로 교통안전시설물 추가 설치

휀스외벽 교통안전 표지판(서행유도) 설치	인접 교차로에 교통안전 표지판(우회전 주의) 설치

장애 요인	∙ 계측기준 수립 시 우리공사 실정에 맞게 참고할 수 있는 기준 부재 ∙ 안전표지판이 오히려 차량통행에 간섭되거나 교통혼선 우려		극복 노력	∙ 계측과 연관된 市 굴토심의 매뉴얼을 근간으로 사례 조사(우리공사 현장, 타기관 관련 매뉴얼 등)를 통해 우리공사 실정에 맞는 기준 수립 ∙ 추가하는 안전표지판의 적정 위치 및 제원에 대하여 관계 기관(관리청, 관할 경찰서 등)과 면밀한 협의를 통해 결정

추진성과 및 환류계획	∙ 계측 관련 타기관 매뉴얼, 현장 사례 등 사례조사 완료 ➜ 매뉴얼·지침 5개, 건설현장 21개 조사완료 계량 ∙ 계층항목별 구체적 계측빈도 및 설치 기준 등 설정 ➜ 필수계측 4개, 선택계측 4개, 세부기준 5개 항목 수립 ∙ 등촌동어울림플라자 안전통행로, 게이트 안전시설물 등 설치 완료 ➜ 1개현장 (4개 구역) 설치완료(100%) ∙ 외부도로와 연접한 건설현장에 강화된 안전표지판 추가설치 ➜ 1개 현장 완료(100%), 1개 현장 설치예정 ∙ 향후 우리공사 흙막이 공사 시 계측관리기준을 적용하여 안전사각지대 최소화한 체계적인 계측관리 가능 환류 ∙ 안전표지판 설치 강화 현장의 운영결과를 토대로 외부도로와 연접한 타 현장에 적용 및 개선 방안 도출

2.2		안전우수 공기업으로 공사의 위상 강화 노력

□ 우리공사, 현장근로자, 지역주민을 대상으로 안전우수 공기업 위상강화 노력

배경 및 현황		문제점		추진방향 및 기대효과
∙ 시공단계 안전관리 내부 규정 부재 ∙ 현장근로자의 안전의식 강화 요구 ∙ 도심지 공사 시행에 따른 사업 반대 민원		∙ 법적기준 내 소극적 안전 관리 ∙ 근로자의 소극적 참여 ∙ 학교 및 주택 밀집지역에 현장 위치		∙ 자체 안전관리 내부기준 강화 ∙ 적극적,주체적인 안전관리 시행 ∙ 지속적인 소통을 통한 민원저감 및 이미지 제고

추진

실적

❍우리공사 대상 _ 건설현장 안전관리자 배치 개선 수립을 통한 사고발생 예방

전사최초

개선 전		SH 자체 안전관리자 배치기준 개선[본부장직무대행 방침 제75호]
∙ 법적 기준만 충족하는 소극적‧형식적 안전 관리 우려 ∙ 신규 또는 현장 채용 계약 안전관리자의 잦은 이직으로 안전관리 부실 문제 발생		∙ 공동주택 최소 2개 현장 이상을 경험한 경력 5년 이상의 안전관리자 배치 : 경력 기준 강화 ∙ 시공사 정규직 직원 배치 책임감 부여 : 자격 기준 강화 ☞ 경력 및 자격 기준 강화로 안전관리자의 사명감 제고 및 처우개선

	개선안 적용		적용결과
	∙ 처 내 2022년 신규 건설현장에 배치기준 적용 ∙ 2022년 신규 현장 (답십리 17구역, 고덕강일 2단지) 안전관리자 배치 완료 ☞ 전체 대비 100% 완료		∙ 현장 담당 감독 만족도 향상 및 안전관리 업무 내실화 ∙ 2022년 현장내 안전사고 0건 발생

❍ 현장근로자 대상_ 우리모두 안전관리자 캠페인 실시를 통한 주체적인 안전관리[본부장직무대행 방침 제138호]

추진배경		추진방향		개선효과
∙ 안전관리 강화 요구 ∙ 근로자 관심 저조		∙ 근로자 안전 아이디어 제안 및 포상 ∙ 안전신고 포상제도 홍보 및 교육 실시		∙ 안전 취약부위 발굴 및 안전의식 고취 ∙면밀한 안전관리 방안 도출 기여

근로자 참여	근로자 제안형 안전향상 아이디어사례(대표)		안전신고 포상제도 홍보
안전향상아이디어선정회의	근골격계질환 테스트	신호수 깃발달기	홍보 및 교육실시
☞ 현장 별 아이디어 3개 선정 및 포상 시행 ∙ 고덕강일 2단지 : 근골격계질환테스트, 신호수 깃발달기, 신발털이기 위치이동 ∙ 답십리 제 17구역 : 작업발판 사다리 상부 공구보관함 설치, 전자호각 도입, 슬링벨트 전용 보관함 설치

❍ 지역주민 대상_지역주민 안전학습로 확보를 위한 상생․공감협의체 구성 및 운영[본부장직무대행방침 제131호]

	∙ 공사모니터링 주민참여단 운영 ∙ 통행로 대책마련을 위한 학부모 협의체 구성 및 운영 ∙ 상시소통 채널 및 비상연락체계 운영		∙ 집중안전관리구역 설정 ∙ 안전통행로 설치 ∙ 신호수 추가배치		∙ 지역주민 안전확보 ∙ 주거 및 학습환경 보장
협의체 구성 및 운영			안전관리 보강

장애 요인	∙ 기준개선을 위한 협의 선행 ∙ 현장 근로자의 소극적 참여 ∙ 사업 반대 민원에 따른 협의체 구성 및 운영의 어려움		극복 노력	∙ 안전관리 개선 회의 개최 등 적극 협력을 통한 개선 방안 적용 ∙ 안전신고 포상제도 적극 홍보(SMS, 교육)를 통한 참여 유도 ∙ 주민설명회 실시 등을 통해 지속적으로 주변관계자 이해· 설득 및 요구사항 적극 반영 노력

추진성과 및 환류계획	∙ 2022년 신규현장 안전관리자 개선 수립 적용완료 ☞ 전체 대비 100% 완료(2개현장), 안전사고 0건 발생 계량 ∙ 주민협의체 구성 및 운영 (8회 / 등촌동 어울림 플라자 건설공사) ∙ 안전관리자 배치 개선 적용현장에 대한 관련 업체 및 감독자 의견 반영하여 건설사업체 내 2023년 신규 착공 건설현장 적용 환류 ∙ 협의체 지속 운영 및 관계자 요구사항 등 종합 분석 후 타 도심지 공사 적용 여부 검토

2.3		자체적인 안전관리 점검계획 수립 노력

□ 발주자 중심의 자체적인 안전관리 체계 강화

배경 및 현황		문제점		추진방향 및 기대효과
∙ ’22.01.27.「중대재해처벌법」제정·시행 ∙ 유해·위험 요인 사전 파악 및 제거·통제 필요 ∙ 발주청의 사업장 안전 및 보건 확보 의무 강화		∙ 불안정한 행동에 기인한 재해 다수 발생 ∙ 기존 시공자 위주의 안전관리 체계에 따른 발주청의 역할 강화 필요		∙ 위험요인 사전 파악 및 대응 가능 ∙ 발주자 주도의 사업 전과정을 포괄하는 안전관리체계 구축

추진

실적

❍ 안전사고 예방을 위한 집중관리제 도입[건축공사부-4741호]

위험작업 집중 관리체계 구축	① 집중관리 대상 위험작업 발굴 ② 현장관계자 간 SNS 시스템 구축 ③ 위험작업 전 안전조치 이행 여부 확인
현장 안전패트롤 의무 시행 및 결과보고 체계 수립	① 시공사 및 감리단 일 1회 이상 안전패트롤 점검 ② 현장점검 시 바디 캠 등 활용하여 기록관리 ③ 안전패트롤 시행 결과 발주청에 일일 보고

❍ 안전관리 워크샵 개최를 통한 발주자 중심 안전관리 체계 강화[도시건축부-2678호]

자양1구역 1-2획지 행복주택 건설공사
워크샵 실시	현장확인	근로자 안전물품 지급
안전관리 전문가 사전검토 ➜안전관리 개선사항 도출	- 시공자의 현장 안전관리체계 보고 - 해당 현장 특화 관리현황 확인 - 현장 우수사항 및 위험요소 발굴, 개선사항 확인 및 피드백	동절기 근로자 체온유지를 위해 넥워머 지급

시공자 위주의 안전관리 체계		발주자 중심의 안전관리 체계
· 현장 중심의 안전관리로 인하여 설계 시 제시한 안전관리체계 내용 적용 미흡 · 현장 중심의 안전관리로 인하여 설계 시 제시한 안전관리체계 내용 적용 미흡		· 설계-시공간 유기적인 안전관리 체계 제시 · 발주자의 책임을 강화하여 시공자·발주자 상생 도모 · 발주자의 적극적 안전관리 의지 제시 및 현장 우수사항 독려를 통한 시공자 신뢰 확보

장애 요인	∙ 현장관계자의 소극적인 이행 의지 ∙ 발주자의 안전관리 의무 강화 ∙ 공사관리관의 안전관리 전문지식 부족		극복 노력	∙ 교차 점검 및 불시 점검을 통한 제도 이행 여부 지속 확인 ∙ 발주자를 주체로 한 워크샵 시행하고 우수사항 및 개선사항 발굴 ∙ 전문가 사전검토 및 워크샵 참석을 통한 안전관리 전문성 증대

추진성과 및 환류계획	∙ 집중관리제도 기준 수립 및 시범 적용 (등촌동 어울림 플라자 건설공사) 계량 ∙ 시공단계 안전관리 워크샵 개최 (자양1구역 1-2획지 행복주택 건설공사)☞ 안전사고 ZERO달성 ∙ 시범적용 및 성과분석 후 적용 현장 확대 적용 검토 환류 ∙ 워크샵 개최 결과(우수사례, 위험요소 등) 검토하여 타 시공현장 확대 적용 검토 ∙ 위험요소 재발여부 및 개선사항 이행여부의 정기적 확인을 통한 안전사고 발생가능성 저감 노력 ∙ 착공단계 안전관리 워크샵으로 확장하여 설계단계 안전관리체계와 시공단계 안전관리사항 연계성 강화 노력

2.4		공정거래 문화조성으로 공사에 대한 신뢰도 향상 노력

□ 적정공사비 및 안전관리 비용 반영을 통한 공정거래 문화조성

배경 및 현황		문제점		추진방향 및 기대효과
∙ 중대재해법 및 안전관련 제도 강화 ∙ 안전관련 기준 제정 부처 간 기준 상이 ∙ 물가 및 자재비용 급등		∙ 비용반영기준 미흡 ∙ 비용집행 혼란 발생 ∙ 설계금액		∙ 안전관리비용 실질 투입을 위한 구체적 기준마련 ∙ 시민안전을 고려한 선도적 노력 ∙

추진

실적

❍ 공사 표준 원가계산 적용기준 개정[본부장방침 제85호]

계속

∙ 조달청 간접공사비 적용기준 개정에 따른 변경 적용

❍ 건설공사 안전관리비 계상기준 개정[본부장직무대행방침 제187호]

신규

구 분	내 용	당 초	개 선
스마트안전장비 구축 및 운용비용	스마트안전장비 구축대상 확대	총공사비 300억이상 해당공사	총공사비 300억이상 건축공사
	금액계상기준 상향(3~6배 상향)	5백만원+(산업안전보건관리비×0.01)	5천만원+ (산업안전보건관리비×요율)
교통 및 시민안전 유도원 배치비용	적용대상 및 금액계상 기준 신설
원거리 CCTV 설치비용	스마트 안전장비 미적용 공사를 대상으로 안전CCTV설치․운영비 반영 기준 신설

산재된 지침․제도의 통합 및 강화된 집행기준 마련 ➜ 실질적 안전관리 집행 근거 마련

❍ 건설자재 적정 공사비 반영

계속

구 분	품 목	적정공사비 반영방안		근 거
사급자재	경량벽체	자재비/설치비	경량벽체 원가산정을 통한 재시행	본부장 직무대행방침 제132호
지급자재	승강기	자재비	주기적(반기) 단가관리 체계 확보	견적발주부-2926호
	수배전반	자격/간접비	혼재된 입찰참가자격 기준 통일 물품성격을 고려한 안전보건관리비 반영	견적발주부-3483

최신단가 반영, 물품성격을 고려한 기준통일 및 안전관리 비용 반영 ➜ 공사 발주업무 신뢰성 확보

장애 요인	∙ 건설원가 상승		극복 노력	∙ 안전한 건설공사 문화조성 ∙ 실사용에 따른 준공시 정산 시행

추진성과 및 환류계획	∙ 안전관리비 기존대비 3~5배 상향 반영 계량 ∙ 관련기준 강화에 따른 적시 금액반영으로 시행 공백 발생방지 검토 환류

2.5		협력업체와 상생협력 강화 노력

□ 하수급인 상생을 위한 협력강화 노력

배경 및 현황		문제점		추진방향 및 기대효과
∙ 현장가설사무소 설치비용에 대한 하수급인용 기준 부재 ∙ 지급자재 수의계약 대상자 POOL 운영		∙ 부당한 비용 전가 우려 ∙ 불공정 거래 발생 가능 ∙ 잠재적 계약 상대자인 협력업체 관리 부재		∙ 계약문서 비용주체 명기 및 비용반영 ∙ 공정 건설문화 조성 ∙ 하수급인 상생협력 강화 ∙ 안전한 건설환경 조성

추진

실적

❍ 하수급인 현장사무실 원가계상 시행 [본부장직무대행 방침 제121호]

필요성		개선방향		세부내용
		∙ 적정 가설공사비 지급기준 마련 ∙ 비용전가 차단 근거 마련		∙ 설치대상, 지급기준 마련 ∙ 적용대상, 공사규모별 설치기준, 금액 기준 반영

∙ 개선사항

구 분	현행내용	개선사항
우리공사 시방서	- 현장가설시설물의 설치 및 유지관리는 수급인의 비용으로 처리토록 함	- 우리공사 시행 건설공사에 대해 감리, 감독자, 수급자, 하수급자를 대상으로 설치토록 “현장설명서 개정”
국토교통부 표준시방서	- 하도급업체 직원용 사무실도 설치 대상
우리공사 견적기준	- 감리, 감독자, 수급자용 현장사무소에 대한 설치기준 있음(하수급인용 기준 부재)	- “하수급인 현장사무소 원가계상 기준” 신설

❍ 지급자재 수의계약 대상(관변단체) 공장점검 시행 [견적발주부-4088호, 견적발주부-5269호]

∙ 4개 공종 7개 품목에 대한 내년도 계약가능 대상자 12개 업체를 대상으로 공장점검 시행

점 검 사 항	내 용
공장 운영 실질 확인	직접생산확인증명 등록공장의 실제 운영 확인
품질관리 현황 확인	공장 운영상태 및 품질관리현황 확인
관리자 면담	애로사항 등 청취

7개 품목 중 신발장 관련 품질시험기준 재검토를 통한 “품질시험비 등 부담경감 필요” 요청

∙ 발굴 개선사항 : 신발장 품목관련, 품질시험기준 및 품질시험비 관련 적정금액 반영을 위한 재검토

구 분	당 초		개 선 사 항
- 신규등록절차 - 신발장 품질시험기준 등 개선필요	- 서류확인		- 서류확인 + 공장방문 확인 - 품질시험기준 및 시험비 재검토

장애 요인	∙ 건설원가 상승 ∙ 산재된 등록공장의 관리방안		극복 노력	∙ 실사용에 따른 준공시 정산 시행 ∙ 효율적 공장점검 대상자 선정(내년도 계약가능자로 한정)

추진성과 및 환류계획	∙ 하수급인 현장사무실 설치비용 관련 불공정성 개선 계량 ∙ 관변단체 공장점검을 통한 품질시험기준 개선 과제 발굴 [발굴 개선사항 1건] ∙ 2023년도 관변단체 공장점검 지속 시행 환류

3		비계량적 성과는 적정한 수준인가?

□ (비계량지표의) 계량적 성과

성과지표	단위	’22년 목표	’22년 실적	달성률	성과분석
건설근로자 /도심특화 안전관리 강화	∙ 방침 ∙ 현장	∙ 수립 ∙ 2	∙ 수립 ∙ 2	∙ 100% ∙ 100%	∙ 매뉴얼·지침 5개, 건설현장 21개 → 필수계측 4개, 선택계측 4개, 세부기준 5개 항목 1건 기준수립 ∙ 1개 현장(등촌동어울림플라자) 안전시설물 설치완료 ∙ 1개 현장(사천빗물펌프장) 교통안전시설물 설치반영
안전우수 공기업 위상강화	∙ 단지 ∙ 횟수	∙ 2 ∙ 1회	∙ 2 ∙ 8회	∙ 100% ∙ 100%	∙ 2022신규 현장 안전관리자 배치 개선 완료 ∙ 등촌동 어울림 플라자 상생·공감 협의체 8회 시행
자체 안전관리 점검계획 수립	∙ 단지 ∙ 횟수	∙ 1 ∙ 1	∙ 1 ∙ 1	∙ 100% ∙ 100%	∙ 등촌동 어울림 플라자 집중관리제(위험작업 집중 관리체계 및 안전패트롤 의무 시행) 도입·시행 ∙ 발주자 중심 안전관리쳬계 확보를 위한 워크샵 개최 완료 (자양1구역 1-2획지 행복주택 건설공사)
공정거래 문화조성	∙ 건	∙ 3건	∙ 3건	∙ 100%	∙ 건설공사 자재/설치/제경비 등 반영 ∙ 특히, 강화된 안전관리 법,기준 마련에 따라 비용기준 마련
협력업체 상생강화	∙ 건	∙ 2건	∙ 2건	∙ 100%	∙ 협력업체 상생강화 방안 1건 발굴 1건 개선

□ 비계량적 성과

성과지표	주요실적	성과분석
근로자/도심특화 안전관리 강화	∙ 계측시스템 체계화 기준 수립 ∙2개현장 안전시설물 설치완료	∙ 도심지공사 증가에 따른 현장 내․외부 안전관리 강화 ∙ 안전사각지대 최소화한 체계적인 계측관리 가능
안전우수 공기업 위상강화	∙ 안전관리자 배치기준 개선 수립 ∙ 우리 모두 안전관리자 캠페인 실시 ∙ 지역주민 참여 상생·공감 협의체 구성, 운영	∙ 공사 내부, 현장 근로자, 지역주민을 대상으로 입체적 안전관리 ∙ 근로자 참여형 안전관리 캠페인 실시를 통한 적극적이고 주체적인 안전 관리 실시 ∙ 지속적인 소통을 통한 사업 반대민원 저감 및 공사 이미지 제고
자체 안전관리 점검계획 수립	∙ 집중관리제 도입·시행 ∙ 시공단계 안전관리 워크샵 개최	∙ 유해·위험 요인 사전 파악 및 제거·통제, 안전사고 저감 ∙ 발주자 중심의 안전관리체계 구축 ☞ 안전사고 ZERO달성
공정거래 문화조성	∙ 건설공사 제경비 요율 개정 ∙ 안전관리비 계상기준 신설 ∙ 건설자재 적정공사비 반영	∙ 강화된 안전관리 법,기준 마련에 따라 비용기준 마련 ∙ 공사 규모별 안전관리 기준 적용을 통한 안전 사각지대 발생 방지
협력업체 상생강화	∙ 하수급인 현장사무실 설치기준 신설 ∙ 공장점검시 관계자 면담을 통한 가구 품질시험비용 검토	∙ 불공정한 비용전가 구조 차단으로 및 협력대상자로서의 하수급인 고려 ∙ 불합리한 기준 개정사항의 발굴을 통한 협력업체 상생 기초 마련

4		성과의 환류활동은 적절하게 수행되었는가?

4.1		경영환경 변화 및 문제점 해결노력

환경변화 및 문제점		해결노력 및 성과
∙ 신규사업 다각화로 도심지 공사가 증가함에 따라 도심지 특성을 고려한 안전관리 필요성 대두 ∙ 중대재해처벌법 시행에 따른 사업장 안전 및 보건확보 의무 강화 ∙ 발주자의 안전관리 권한과 책임 강화에 따른 일괄적인 안전관리 체계 수립 필요 ∙ 공사감독부서의 안전관리 전문지식 부족 ∙ 현장 근로자의 안전개선 소극적 참여 ∙ 안전관련 기준 제정 부처 간 기준 상이 ∙ 물가 및 자재비용 급등 ∙ 협력대상으로 하도급업체 미고려 ∙ 도심지 공사 시 지역관계자(주민,학교 등) 민원 과다 발생		∙ 계측관리 기준 마련 ∙ 인근이용자 안전사고 예방 시설물 강화 설치 ∙ 발주자를 중심으로 워크샵 시행하고 우수사항 및 개선사항 발굴 ∙ 발주자의 적극적 안전관리 의지 제시를 통한 건설업 상생발전의 토대 마련 ∙ 안전관리전문가의 안전관리도서 사전검토 및 워크샵 참석을 통한 안전관리 전문성 증대 ∙ 안전신고 포상제도 적극 홍보(SMS, 교육)를 통한 안전 의식 고취 및 근로자 참여 유도 ∙ 안전관리비용 실질 투입을 위한 구체적인 통합 기준마련 ∙ 설계단가 작성기준 재검토를 통한 적정단가 반영 ∙ 하도급업체를 협력 대상의 확대 및 가설시설물 설치기준, 비용 반영 기준 마련 ∙ 지역관계자와의 지속적인 소통 및 요구사항 적극 반영 노력

4.2		향후 개선과제 및 추진방안

구분	향후 개선과제	추진방안
도심특화 안전관리 강화	∙ 안전표지판 설치에 효과 분석	∙ 안전표지판 설치 강화 현장의 운영결과
안전우수 공기업 위상강화	∙ 협의체 내용 분석 및 타단지 적용 검토 ∙ 안전관리자 배치 방식 변경 효과 분석	∙ 협의체 운영 시 도출된 관계자 요구사항 등을 종합분석 후 타 도심지 공사 적용 여부 검토 ∙ 22년 안전관리자 배치 개선 현장 담당자 의견 청취 및 검토를 통해 23년 신규 현장 적용
자체 안전관리 점검계획 수립	∙ 성과분석 및 적용 확대 ∙ 워크샵 결과(현장 우수사항 및 개선사항)를 활용한 타현장 적용 필요	∙ 시범적용 및 성과분석 후 적용 현장 확대 여부 검토 ∙ 워크샵 결과 공유 및 타현장 적용하여 우리공사 전체현장에 대한 안전관리체계 강화
공정거래 문화조성	∙ 상생협력 방안 지속 발굴 ∙ 건설공사비 과다 지출 방지	∙ 관련기준 강화에 따른 적시 금액반영으로 시행 공백 발생방지 검토 ∙ 안전관리비 기준에 따른 정산 철저
협력업체 상생강화	∙ 가구류 품질시험기준 개정 검토 ∙ 2023년도 공장검수 지속 시행 ∙ 건설공사비 과다 지출 방지	∙ 시방개정사항 검토 ∙ 지속적인 관계자 면담을 통한 개선사항 발굴 ∙ 가설사무소 설치 실비용에 따른 정산 철저