설계변경자문회의(소위원회)결과(제9차)

【2014. 10. 6(월)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			김성권					요청일자			2014. 9
공 사 명			약수고가차도 철거 및 교통개선공사										심의안건		① 지장 상수도 이설비 반영
공 사 개 요			공사규모				○ 고가차도 철거 : 폭15.4m, L=420.0m ○ 환기구이설 3개소
			공사기간				2013. 12. 23. ~ 2014. 10. 31
			감 리 사				(주)대한콘설탄트, (주)신명건설기술공사
			설 계 사				(주)드림이엔지
			시 공 사				용성종합건설(주), (유)동현건설, 은하수산업(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 89,705천원
설계변경 사유(요약) ○ 고가차도 철거에 따른 고가하부의 환기구이설 공사에 저촉되는 상수도관 및 소화전 이설
원설계자 의견(요약)
자문결과		조건부가결			○ 신규단가에 대해 협의율 92.757%를 적용하였으나, 이에 대한 협의 근거자료가 없으니 보완할 것(p13) ○ 예산절감 및 경제적인 측면에서 자재비교표(신규단가)상 조달청 단가를 추가 비교하여 반영할 것(p119) ○ 일위대가 제31호표(KP이탈방지압륜접합)상 할증이 중복 계상된 것으로 판단되니 재검토해볼 것(2차선 도로 및 6차선 도로 할증 중복)-p89 ○ 주철(이형관) 운반을 덤프트럭(5ton)으로 적용하였으나, 예산절감 및 경제적인 측면에서 카고트럭과 비교하여 반영할 것(p179) ○ 신규일위대가표상 야간작업 및 능률저하, 도심지 할증 적용후 금액 적용시 오류가 있으니 재검토해볼 것(p83~p104) ○ 중기 일위대가의 환율 및 유류대 적용 근거자료가 없으니 보완할 것 ○ 기타, 자재비의 시중물가 비교시 가격정보를 첨부하여 비교해 볼 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제9차)

【2014. 10. 6(월)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			김성권					요청일자			2014. 9
공 사 명			약수고가차도 철거 및 교통개선공사										심의안건		② 옹벽부 아스팔트깨기 시공물량 정산
공 사 개 요			공사규모				○ 고가차도 철거 : 폭15.4m, L=420.0m ○ 환기구이설 3개소
			공사기간				2013. 12. 23. ~ 2014. 10. 31
			감 리 사				(주)대한콘설탄트, (주)신명건설기술공사
			설 계 사				(주)드림이엔지
			시 공 사				용성종합건설(주), (유)동현건설, 은하수산업(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 48,051천원
설계변경 사유(요약) ○ 고가차도 철거에 따른 옹벽부상단의 아스팔트 두께 및 기존옹벽이 설계도서와 상이하며, 하수관은 가시설에 저촉된 구간만 이설
원설계자 의견(요약)
자문결과		조건부가결			○ 설계도서와 상이한 부분에 대한 원설계자 의견이 없으니 보완할 것 ○ 철근콘크리트깨기시 발생되는 철근량의 고재처리 비용이 빠진 것으로 보이니 확인 후 반영할 것 ○ 시․종점부 옹벽 철거시 구조물 하단 버림콘크리트(10cm)를 철근콘크리트깨기 물량으로 반영하였으니 무근콘크리트깨기 물량으로 변경할 것(p287,p289)
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제9차)

【2014. 10. 6(월)】

문서요청부서			방재시설부					담 당 자			한종수					요청일자			2014. 9
공 사 명			용허리공원 빗물저류조 설치공사										심의안건		③ 서초대로 횡단관로 및 U형측구 추가 반영
공 사 개 요			공사규모				○ 빗물저류조: V=15,000㎥ 유입관로 L=237.45m(2.0×1.5@1)
			공사기간				2012. 12. 21 ~ 2014. 09. 30
			감 리 사				㈜신명건설기술공사외 2개사
			설 계 사				현대엔지니어링㈜외 1개사
			시 공 사				케이월드종합건설㈜외 1개사
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 288,282천원
설계변경사유(요약) ○ 당초 유입관거 설계시 지장물조사 미흡으로 기존하수관으로 연결이 불가하여 서초대로 횡단관로 및 U형측구 추가설치로 변경 시공
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ FRP 암거 구조계산에 대한 기술지원감리원 검토의견서가 누락되어 있으니 보완할 것(p106) ○ 예산절감 및 경제적인 측면에서 자재비교표(신규단가)상 조달청 단가를 추가 비교하여 반영할 것(p141) ○ 개별도색작업은 실선, 파선, 기호나 문자 등이 혼합되지 않을 시 효율을 고려하여 적용되어야 하나 각기 효율을 적용하였으므로 삭제후 재산정함이 적정한 것으로 판단되니 재검토해 볼 것 ○ 차선도색 일위대가 산출시 장비(덤프트럭) 노무비가 공구손료에 포함되어 있으니 재검토후 반영할 것(p51~p58) ○ 수량산출서상 계산 오류가 많으니 확인 후 수정할 것(p173~p189) ○ 일위대가 산출서상 모래, 자갈은 시내도착도로 별도의 소운반 적용은 과다하다고 보이니 재검토후 반영할 것(p42~p46) ○ 일위대가 산출서상 철근콘크리트깨기에 들어내기품은 과다하다고 판단되니 삭제 등 재검토하고, 또한 철근콘크리트깨기시 발생되는 철근량의 고재처리 비용이 누락되어 있으니 확인 후 반영할 것(p68)
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제9차)

【2014. 10. 6(월)】

문서요청부서			방재시설부					담 당 자			한종수					요청일자			2014. 9
공 사 명			용허리공원 빗물저류조 설치공사										심의안건		④ 저류조내 잡철물 제작 등 서초구청 요구사항 반영
공 사 개 요			공사규모				○ 빗물저류조: V=15,000㎥ 유입관로 L=237.45m(2.0×1.5@1)
			공사기간				2012. 12. 21 ~ 2014. 09. 30
			감 리 사				㈜신명건설기술공사외 2개사
			설 계 사				현대엔지니어링㈜외 1개사
			시 공 사				케이월드종합건설㈜외 1개사
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 136,760천원
설계변경사유(요약) ○ 유지관리부서인 서초구청과의 합동점검에 의한 저류조내 계단, 난간, 스크린망, 펌프실출입구, 인양구덮개, 메쉬휀스 등의 시설물에 대한 서초구청 요구사항 반영
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 예산절감 및 경제적인 측면에서 SUS 잡철물 제작품에 의한 금액과 견적서 금액을 비교하여 최저단가로 적용할 것 ○ 잡철물 견적서 스텐계단 규격이 도면과 상이하니 확인후 수정할 것(p262, p264) ○ 메쉬 u형밴드, 주주 등 도면과 견적서 규격이 상이하니 확인 후 수정할 것(p274, p275, p295)
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제9차)

【2014. 10. 6(월)】

문서요청부서			방재시설부					담 당 자			한종수					요청일자			2014. 9
공 사 명			용허리공원 빗물저류조 설치공사										심의안건		○ 저류조내 낙차보호공 등 설계누락 및 상이한 사항 내역 반영
공 사 개 요			공사규모				○ 빗물저류조: V=15,000㎥ 유입관로 L=237.45m(2.0×1.5@1)
			공사기간				2012. 12. 21 ~ 2014. 09. 30
			감 리 사				㈜신명건설기술공사외 2개사
			설 계 사				현대엔지니어링㈜외 1개사
			시 공 사				케이월드종합건설㈜외 1개사
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 25,750천원
설계변경사유(요약) ○ 당초 설계에 누락된 낙차보호공, 출입구계단, 기계실상부방수, 토출관로 연장 상이로 인한 사항을 변경 설치하여 내역에 반영
원설계자 의견 요약 :
자문결과		부결(반려)			○ 설계변경 자문대상에 해당되지 않아 반려
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제9차)

【2014. 10. 6(월)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			손준호					요청일자			2014. 9
공 사 명			신촌로 중앙차로 및 교통구조개선공사외 1개소										심의안건		⑤ 절단 부재 현장내 소운반 반영 (신촌로)
공 사 개 요			공사규모				○ 고가차도 철거 : 폭15.0m, L=470m ○ 버스중앙차로 연장1km, 중앙승강장 4개소
			공사기간				2013. 06. 20. ~ 2014. 09. 19
			감 리 사				(주)동해종합기술공사, (주)경동엔지니어링
			설 계 사				(주)신명건설기술공사, (주)도화엔지니어링
			시 공 사				에스트건설(주), (주)준경산업개발
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 197,194천원
설계변경사유(요약) ○ 당초 아현고가 철거시 절단부재는 중간집하장으로 운반하여 폐기물처리 하는 것으로 설계되어있었으나 관련법령에 위배되어 중간집하장 운영이 불가능하여 현장에서 파쇄하여 폐기물처리하는 것으로 변경됨, 그에 따라 부재인양후 현장내 파쇄장으로 소운반한 실제 물량을 정산
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 자재단가 산출시 경유는 부가세를 포함하여 적용하고 내역서에서는 부가세를 삭제한 금액을 적용하였으나, 적용한 금액의 근거가 명확하지 않으니 재검토하여 보완할 것 ○ 기계경비 산출내역 중 환율적용 등이 잘못되어 있으니 산출근거를 재검토한 후 조정할 것 ○ 단가산출서상 단가적용이 일부 상이한 부분이 있으니 재검토해 볼 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제9차)

【2014. 10. 6(월)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			손준호					요청일자			2014. 9
공 사 명			신촌로 중앙차로 및 교통구조개선공사외 1개소										심의안건		⑥ 절단 부재 현장내 소운반 반영 (마포로)
공 사 개 요			공사규모				○ 고가차도 철거 : 폭15.0m, L=469m ○ 버스중앙차로1.2km, 중앙승강장 2개소
			공사기간				2013. 06. 20. ~ 2014. 09. 19
			감 리 사				(주)동해종합기술공사, (주)경동엔지니어링
			설 계 사				(주)신명건설기술공사, (주)도화엔지니어링
			시 공 사				유호산업개발(주) 해마건설(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 289,436천원
설계변경사유(요약) ○ 당초 아현고가 철거시 절단부재는 중간집하장으로 운반하여 폐기물처리 하는 것으로 설계되어있었으나 관련법령에 위배되어 중간집하장 운영이 불가능하여 현장에서 파쇄하여 폐기물처리하는 것으로 변경됨, 그에 따라 부재인양후 현장내 파쇄장으로 소운반한 실제 물량을 정산
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 자재단가 산출시 경유는 부가세를 포함하여 적용하고 내역서에서는 부가세를 삭제한 금액을 적용하였으나, 적용한 금액의 근거가 명확하지 않으니 재검토하여 보완할 것 ○ 단가산출서상 운반 및 적하단가는 ton당 단가로 (×2)에 대한 적용이 명확하지 않으니 재검토하여 반영할 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제9차)

【2014. 10. 6(월)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			손준호					요청일자			2014. 9
공 사 명			신촌로 중앙차로 및 교통구조개선공사외 1개소										심의안건		⑦ 아현고가 조형물 제작,설치비 반영(마포로)
공 사 개 요			공사규모				○ 고가차도 철거 : 폭15.0m, L=469m ○ 버스중앙차로1.2km, 중앙승강장 2개소
			공사기간				2013. 06. 20. ~ 2014. 10. 31
			감 리 사				(주)동해종합기술공사, (주)경동엔지니어링
			설 계 사				(주)신명건설기술공사, (주)도화엔지니어링
			시 공 사				유호산업개발(주) 해마건설(주)
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 130,000천원
설계변경사유(요약) ○ 국내 최초로 건설된 아현고가차도 역사적 상징성 보존과 시민들에게 수준높은 볼거리 제공을 위해 철거 잔재를 재활용하여 조형물(흔적) 설치
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			○ 견적서 공종을 세분화하고, 부가세 ․ 제경비 등을 명확히 표기후 내역을 작성하는 것이 적정할 것으로 판단되니 재검토해 볼 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원