문서번호	도로보수과-9094
결재일자	2014.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
권세봉		10/13 이규철
협 조
	주무관		이상하

2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시 완료 보고(제7차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
도로보수과-8544				20,619천원

2014.  10. 13(월)

서부도로사업소

(도로보수과)

2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시 완료 보고(제7차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014. 03. 27 ~ 2015. 02. 28

○ 시 공 사 : 아람건설(주) 대표 김익신

○ 도 급 비 : 335,767,910원

□ 작업완료 보고

○ 건  명 : 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제7차)

○ 작업위치 : 중구 을지로6가 23-6 등 17개소(굴착복구 구간)

○ 작업기간 : 2014. 09. 24 ~ 2014. 10. 10

○ 작업내역

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
1	중구 을지로6가 23-6	208m	208m	-
2	중구 을지로5가 교차로 주변	1,651m	1,700m	증) 49m	시공물량 차이
3	중구 예장동 1-43	28m	28m	-
4	마포구 상암동 1706	5,020m	2,467m	감)2,553m	유지보수물량 제외
5	중구 광희사거리	79m	79m	-
6	은평구 통일로 961-873	2,520m	2,520m	-
7	은평구 통일로 873-793	1,624m	1,624m	-
8	중구 오장동 181-4	12m	12m	-

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
9	중구 남산동1가 1-2	43m	43m	-
10	서대문구 남가좌동 296-16	124m	124m	-
11	마포구 상수동 107-3	39m	39m	-
12	중구 을지로3가 ~ 충무로26	1,787m	1,787m	-
13	마포구 합정동 420	49m	49m	-
14	마포구 합정동 384-1	14m	14m	-
15	중구 서소문로135, 115	190m	320m	증) 130m	시공물량 차이
16	중구 정동5-8, 대한문앞, 북창동길입구	213m	0m	감) 213m	기 작업되어 있음
17	은평구 응암로 152~274	813m	915m	증) 102m	시공물량 차이
합 계		14,414m	11,929m	감)2,485m

○ 공사금액

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
제7차 작업지시	25,415천원	20,619천원	감) 4,796천원	굴착복구

○ 변경사유

- 주변 노면표시 퇴색구간 물량제외 : 1개소

- 기 작업완료 구간 작업물량 제외 : 1개소

- 시공물량에 따른 작업물량 차이 : 3개소

□ 향후계획

○ 성암로 굴착구간 주변 노면표시 퇴색으로 작업완료하였으나 물량 제외구간은 본공사 제9차에 포함하여 작업지시.

붙 임 : 1. 제7차 작업완료 내역서 1부.

2. 제7차 작업완료 도면 1부.

3. 제7차 작업완료 사진대지 1부.  끝.