문서번호	정보자원운영과-799
결재일자	2023. 1. 27.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정보자원운영과장	데이터센터소장
송은주		김성국	01/27
			추경수
협 조	인터넷통신과장			황기원
	주무관			오승희
	주무관			송상봉
	주무관			임연주
	주무관			홍순석

2023년 전산장비 유지관리 연간 추진 계획

2023. 1.

데이터센터

(정보자원운영과)

2023년 전산장비 유지관리 연간 추진계획

정보시스템 무중단 서비스 제공과 장애 발생시 신속한 조치를 위하여   정보시스템 유지관리 용역 계약을 체결하고, 연간 유지관리 계획을 수립하여 안정적인 서비스를 제공하고자 함

1		추진개요

□ 장비현황

구 분	백오피스	프론트오피스	종합관제실	백업센터	합계
서 버	***	***	**	*	***
스토리지	**	**	*	*	**
백업장비	**	*	*	*	**
기 타	**	**	***	*	***
S W	***	**	***	*	***
총계	***	***	***	**	*****

	<정보시스템 유지관리 사업개요>
❍ 사업기간 : 2022.1.1 ~ 2023.12.31 (24개월) ❍ 사업범위 : *********************************** ❍ 계약금액 : ******************************** ❍ 계 약 자 : 삼양데이타시스템 컨소시엄

□ 주요내용

○ 장애피해 최소화를 위한 신속한 즉시 대응체계 구축

○ 장애예방을 위한 효율적인 점검 및 기술지원 계획 수립

○ 전문 기술지원(2명) 및 관제실 운영인력(6명) 상시 근무

○ 시스템 운영 환경 개선 및 최적화

○ 종합관제시스템 등 운영지원시스템 유지관리

2		사업수행 조직

□ 사업 추진 체계

수행조직		구 분	합계
데이터센터	정보자원운영과	************* ******************** ******************** *****************
	인터넷통신과	**********************
유지관리 사업자	주사업자	******************** *********************** ***************** ********************** ******************** *********************** *******************	컨소시엄 및 협력업체 포함
	보조사업자	********************* ******************** **********************

□ 유지관리 수행 조직

구분	성명	담당업무	근무
PM	***	사업총괄(PM)	2층 사무실
기술지원	***	백오피스 총괄(PL)	2층 사무실
	***	IBM(x86,p시리즈) 담당	2층 사무실
	***	DBMS 담당	2층 사무실
	***	공개 SW 담당	2층 사무실
관제지원	***	관제 총괄(PL)	2층 관제실
	***********************	관제 및 취약시간 장애대응	2층 관제실
사업관리	***	사업관리/품질관리	비상주

3		정보시스템 연간 세부추진 계획

1. 안정적 운영관리 방안

□ 예방점검 수행 방안

○ 점검방법

- 정기점검 : 매달 정기점검 대상 확정 후 계획에 의해 단계적 점검 수행

- 수시점검 : 시스템실 육안점검 및 관제 모니터링(24시간)

- 특별점검 : 장비 담당자와 협의하여 점검 대상 및 점검 항목 정의

○*******************

*************************************

○ 관제실 운영 관리

****************************************************

*************************************************************

**********************************

***********

************************************

*********************************************************************************

- 점검내용

*********************

· 백업SW 및 가상화서버 모니터링, 주요시스템 수동점검

· 종합관제시스템 및 APM 이벤트 관련 장애 초기 대응

□ 이중화 및 재해복구 테스트 지원

○ 대상

- 이중화 테스트 : 최근 2년내 이중화테스트 미실시 장비

********************************************○ 주관부서

- 이중화 테스트 : 정보자원운영과

- 재해복구테스트 : 세무과(※정보자원운영과 지원)

○ 테스트 절차

테스트

시나리오 점검

서버 상태

점검

시나리오 기반

테스트 수행

서비스

가동상태 점검

테스트

결과 확인

□ 백업테이프 소산

○ 대상 : 분기백업 복제테이프(※ 온라인 소산 제외)

○ 방법 : ***************************

○ 추진일정 : 연4회******************

□ 시스템실 환경개선

○ 추진내용

- 엑세스플로어 교체(300개) 및 컨테인먼트 해제/조립

- 장비주변, 엑세스 플로어 상·하부 및 컨테인먼트 내·외부 먼지제거

- 시스템실내 미사용 통신 케이블 철거 및 불용장비 폐기

○ 추진일정

- 엑세스플로어 교체 : 5월

- 시스템실 환경 정비 : 12월

□ 정보자산 관리 운영 및 기능개선

○ 자산목록 관리 대상

- HW : 서버, 스토리지, 백업장비, 부가장비(SAN, KVM 스위치 등)

- SW : DBMS, 백업SW, 성능관리SW, 기타SW

○ 현행화 추진 일정

- 유지관리 대상 실사 : 2월, 7월

- 시스템실 랙배치도 현행화 : 3월, 8월

- 정보자산 위치관리 정보 현행화 : 3월, 8월

○ 자산관리시스템 기능개선 사항

***********

***********************************

***************************************

○ 자산관리시스템 기능개선 일정

****************************

********************************

*******************************

2. 장애관리 방안

□ 신속한 장애대응 체계 구축

○ 장애감지 : 정보서비스 종합관리시스템 및 NMS, 예방점검

○ 장애상황 파악 : 대상장비 점검, 서비스 중단유무, 장애원인 파악

○ 장애대응 조직 운영

- 취약시간대 : 관제근무지원(초동대응), 비상연락체계 유지

- 장애조치 : 상주인력(전문가 4명), 협력사 및 제조사 기술지원

- 후속조치 : 기술지원인력의 시스템 점검 및 서비스 이상유무 확인

○ 전문업체 지원 : *******************************

□ 장애조치 프로세스

통합 유지관리				SMS/NMS 장애감지	⇨		종합관제실
1. 장애접수 및 장애원인 분석 2. 장애조치 3. 미해결 장애 조치방안 마련							장애접수 및 초동조치 (상시근무자)
			장애처리 요청	데이터센터				미해결시 지원요청
			⇦	장애발생 (시스템관리자 조치)			비상연락체계
	미해결시 2차 기술지원						유지관리 비상연락망 가동
								미해결시
2차 기술지원				장애관리			비상연락체계
- 제조사 기술지원 - 전문협력사 지원				장애발생 일시 장애발생 내용 원인 분석결과 장애 조치결과 사후관리			- HW/SW 담당자 - 정보통신, 정보보호 유지보수 - AP 유지보수

□ 예비 부품 전진배치

❍ 예비부품 확보 내역

- 보관현황 :**************************

- 보관장소 : 데이터센터 내화금고

❍ 수급 및 활용

- 예비부품 활용 : 교체 빈도가 높은 부품을 센터에 배치하여 신속한 지원

❍ 추진일정

- 2월, 7월 : 부품입고 보고

- 년 2회 : 사용내역 보고

□ 유지관리 성과지표 정의

❍ 대상 : 정보시스템유지관리 사업자(삼양데이타시스템 컨소시엄)

❍ 성과지표 기준

******************

***************************

- 장애조치시간

장애통보 후 2시간 이내 도착, 4시간 이내 복구완료(내부시스템)

장애통보 후 1시간 이내 도착, 2시간 이내 복구완료(대시민서비스)

- 보안위반 건수 : “서울시 외주 용역사업 보안 특약”에 따름

3. 정보시스템의 성능개선 및 보안관리

□ 최신 패치적용

❍ 적용주기

- 수시 : 긴급 보안패치, 장애조치를 위한 패치, 장애 후속관리

- 정기 : OS보안 업데이트, 윈도우 패치, 정기백업시(서비스 중단 패치적용)

❍ 패치정보 수집 및 제공

- 제조사에서 제공하는 업그레이드 및 패치 정보 수집

- 유지관리 대상 시스템 중 적용대상 검토

- 업그레이드/패치 제공 및 일정 및 지원 방안 협의

❍ 패치 절차

계획수립		사전 영향도 검토		패치 수행		안정화 지원

문제 발생 가능성 검토       모니터링 및 변경관리 자료제공

□ 성능진단

❍ 수행 체계

- 데이터센터, 유지관리 수행사, 제조사/협력사의 협업

- 구조진단 및 성능진단을 수행하여 결과 공유(시스템관리자간)

❍ 대상

-***************************

❍ 절차

사전준비		성능진단 계획수립		성능분석 및 보고		사후관리

*****************************

4		추 진 일 정

□ 연간 추진일정

❍ 월 1회   : 정기점검 및 월간보고

❍ 분기 1회 : 서버 및 DBMS 성능점검

❍ 계약 변경 : 변경사유 발생시 (5월, 11월 계약체결)

□ 월별 추진계획

구 분	*************	비 고
1월	************ *************
2월	*************
3월	*********** ********
4월	****************** *********************
5월	********************
6월	*************
7월	**************
8월	***************** ********************
9월	************
10월	******************
11월	************** *******************
12월	************** ******************

5		행 정 사 항

□ 정보자원운영과, 인터넷통신과

❍ 정보시스템 연간 세부추진 계획에 따라 이행절차 적용

□ 유지관리 사업자

❍ 정보시스템 유지관리 연간 계획에 따라 사업관리.  끝.