문서번호	주차관리과-13466
결재일자	2023. 02. 24
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호	부구청장 제133호

주무관		주차시설팀장		주차관리과장		건설교통국장		부구청장
배기량		김미경		정충영		이욱근		전결 02/24
								마채숙
협조

- 창신소담 공영주차장 및 복합시설 건설공사 건설사업관리용역 -

설계변경(제5회) 검토 보고

건설교통국

주차관리과

- 창신소담 공영주차장 및 복합시설 건설공사 건설사업관리용역 -

설계변경(제5회) 검토 보고

「창신소담 공영주차장 및 복합시설 건설공사」의 공기연장으로 공사감독업무대행중인「건설사업관리용역」의 과업기간 연장 및 계약금액 조정을 위한 설계변경(제5회) 검토 보고임

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 창신소담 공영주차장 및 복합시설 건설공사 건설사업관리용역

○ 용역기간 : 2018. 10. 12. ~ 2023. 2. 11.

○ 계약금액 : 1,663,579천원

○ 계 약 자 : ㈜다인그룹엔지니어링건축사사무소 대표 이경희

□ 설계변경내용

○ 계약변경사유

- 본 용역은「창신소담 공영주차장 및 복합시설 건설공사」의 공사감독업무대행 등 건설사업관리 용역으로, 현장여건상 시설공사의 공기가 연장됨에 따라 원활하고 연속된 사업관리를 위해 (계약예규)용역계약일반조건 제19조 및 제24조에 의거 감리기간 연장 및 계약금액 조정

- 창신소담 공영주차장 건설공사 준공기한 연기 검토보고(주차관리과-26632, 2022. 8. 26.)

- 공기연장에 따른 변경계약 승인 요청(다인CM22-648, 2022. 12. 9.)

○ 계약기간 변경사항

- 당초 : 2018.08.12. ~ 2023.02.11.

- 변경 : 2018.08.12. ~ 2023.07.28.(증166일)

○ 계약금액 변경내용

(단위 : 원)

구 분		용 역 금 액		증 · 감
		당 초	변 경
용역비	공급가액	1,434,836,364	1,531,954,546	증)	97,118,182
	ESC 1회	69,351,000	69,351,000		-
	손해공제부금	15,908,000	16,948,000	증)	1,040,000
	부 가 세	143,483,636	153,195,454	증)	9,711,818
	도 급 비	1,663,579,000	1,771,449,000	증)	107,870,000

□ 행 정 사 항

○ 상기 보고내용과 같이 준공기한을 연장하고, 그에 따른 기간연장 및 계약금액 조정내역을 반영한 설계변경(5회) 시행

붙임  1. 설계변경사유서(제5회) 1부.

2. 변경내역서(제5회) 1부.

3. 시설공사 준공기한 연기 검토보고 1부.

4. 다인CM22-648호 공기연장에 따른 변경계약 승인 요청 1부.  끝.