아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	성 북 소 방 서
수신	서 울 특 별 시 장(소방행정과장)
(경유)
제목	77.소방관서 시설물 유지 보수 사업 긴급 예산 재배정 요청

1. 관련문서

가. 市 소방행정과-1209(2023.1.13.)호 「2023회계연도 '소방관서 시설물 유지보수'예산배정 내역 알림」

나. 소방행정과-2745(2023.3.23.)호 「본서 강당 바닥재 교체 공사 계획」

다. 소방행정과-3299(2023.4.5.)호 「2023년 본서 강당 바닥재 교체 공사 계약 체경 보고」

라. 소방행정과-3504(2023.4.14.)호 「본서 강당 바닥재 교체 공사 실정 보고」

2. 2023년 성북소방서 본서 강당 바닥재 교체 공사 착공 중 공사 물량 증가 및 추가 공사 소요가 발생하여 그에 따른 긴급 예산 재배정을 다음과 같이 요청합니다.

가. 건    명: 2023년 성북소방서 본서 강당 바닥재 교체 공사

나. 현장실정

1) 기존 바닥재 철거를 위해 벽면 일부 철거 중 벽면 하부 손상 발견

2) 환기부실 및 단열재 시공 불량으로 결로 현상에 의한 벽면 손상 진행

3) 기존 바닥재 철거 시 벽면 하부 마감재 동시 탈락

다. 실정보고에 따른 검토 의견

1) 기존 공사 진행 시 준공 완성도 저하 및 하자 발생 우려

2) 공사범위 증가에 따른 추가 예산 필요

라. 긴급예산 요청내역***********

통계목	금액(천원)	세부내역
합 계	********	********************
시설비	********	*********************** *********************** ****************************

마. 예산과목: 소방관서 시설물 유지보수 / 시설비(401-01)

붙임  1. 본서 강당 바닥재 교체 공사 실정 보고 1부.

2. 실정보고서(설계변경 요청건) 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.  끝.

	성 북 소 방 서 장
반장	백인창		장비회계팀장	한일수		소방행정과장	김연경		소방서장	04/14
박용호
협조자
시행	소방행정과-3523	(	2023. 4. 14.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3, 3층 소방행정과 (종암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-6981-7221	/전송	02-2187-8201	/	baekfire@seoul.go.kr	/	부분공개(5)