아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서도로사업소
수신	기전과장
(경유)
제목	계약 변경 체결 통보(외발산지하차도 저압수전 및 노후전력설비 교체공사)

1. 기전과-4097(2023.04.28.)호와 관련입니다.

2. 아래와 같이 계약을 체결하고 통보하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계약건명: 외발산지하차도 저압수전 및 노후전력설비 교체공사

구 분	변 경 전	변 경 후	사유
준공기한	2023. 05. 10.	2023. 06. 30.	변압기 제작기간 추가소요로 공기부족

나. 계약금액:*************

다. 계약상대자: (주)수림전력 대표자 민병삼

라. 계약일자: 2022.12.15.

마. 변경사항:

바. 계약변경일자: 2023.05.08.

붙임 : 공사변경계약서 1부.  끝.

	관 리 단 속 과 장
주무관	김애연		관리단속과장	05/09
최영무
협조자
시행	관리단속과-5169	(	2023. 5. 9.	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 관리단속과 (마곡동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7990	/전송	02-2657-7939	/	kay1129@seoul.go.kr	/	부분공개(7)