문서번호	평생교육과-6116
결재일자	2023. 6. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		평생교육정책팀장	평생교육과장
송계수		신선이	06/09
			박진용
협조

「미래시민학교(가칭 인생전환지원센터) 조성」

예산 감추경 계획

2023. 6. 8. (목)

평생교육과

「미래시민학교(가칭 인생전환지원센터) 조성」

예산 감추경 계획

평생교육과장 : 박진용☎2133-3960 평생교육정책팀장 : 신선이☎3962 담당 :송계수 ☎3964

철거공사 허가절차 지연 등 불가피한 공가 기간 연장사유 발생으로 '23년

미집행 예산을 감추경하여 예산의 효율적 관리에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 소 재 지 : 중구 정동 34-17, 34-18

○ 사업기간 : ’22.1월 ~ ’24.2월(설계~준공)

○ 사업내용

- 직업연계 맞춤형 취․창업 교육 및 학습결과를 실험하고 성장하는 공간으로 운영

- 이·전직 등 직업전환을 필요로 하는 40대의 수요기반 맞춤형 교육 지원 총괄

○ 사업범위 : 기존건물 리모델링(지하1층, 지상4층)

○ 사 업 비 : 9,500백만원(집행액 8,319백만원, 집행률 87.6%)

□ 추진근거

○ 시민주도학습플랫폼 리모델링공사 공기연장 검토 보고(도시기반시설본부 건축부-5534, '23.4.5)

※ '21년 시민주도학습플랫폼 조성운영사업으로 추진하였고, '23년 사업명 변경

□ 감추경 사유

○ 리모델링 공사 진행과 관련하여 철거공사 허가절차가 2개월 지연되어 공사 준공일정이 당초 ’23.12월에서 ’24.2월로 조정됨에 따라 '23년 미집행  예산 발생

□ 감추경 계획

○ 예 산 액 : △200백만원

○ 세부내역

(단위 : 천원)

구분	기정예산 (A)	감추경액 (B)	추경예산(안) (A□B□C)	비고
계	4,194,894	△ 200,000	3,994,894
시설비	4,104,971	△ 200,000	3,904,971
감리비	87,523	-	87,523
시설부대비	2,400	-	2,400

○ 예산과목 : 평생교육국 평생교육과, 다양한 평생교육환경 조성, 평생교육사업 효율적 추진, 미래시민학교(가칭 인생전환지원센터)조성 운영, 시설비

□ 향후계획

○ 공사기간 연장에 따른 '23년 감추경액에 대한 '24년 본 예산 확보

※ '24년 준공에 맞춰 인건비, 물가 상승 비용 등을 감안한 최종 시설비 등 추가 확보