아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]두산 지하차도 공사 및 완공

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20230724900174)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 현재 진행중인 디지털3단지~두산길간 지하차도 건설공사가 당초 예정된 2024년이 아니라 2029년에 준공된다는 것에 대하여 정확한 내용을 알고 싶고, 또한 공사기간을 단축할 수 있는 방법이 없는가에 대하여 문의하신 것으로 보입니다.

귀하의 요청사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

디지털3단지~두산길간 지하차도건설공사 2017년 12월 착공하였으나 교학사의 지장물 이전 관련 명도소송 등으로 장기간 공사가 중단되었다가, 올초부터 지장건물 철거를 시작하여 4월에 지장건물 철거를 완료하였습니다.

하지만, 이번에 설치되는 지하차도는 경부선 철도 하부를 횡단하는 부분이 있으며, 철도횡단구간은 서울시에서 공사를 실시하지 않고 국가철도공단에 위·수탁방식으로 공사를 의뢰하여 진행하게 됩니다. 당초 여러차례 위·수탁을 추진하였으나, 소송등으로 인해 공사가 진행되지 못하여 위·수탁 추진이 중단되었다가 현재는 철도입체교차시설 재심의에서 요청한 지하안전평가 등 보완설계가 진행중에 있습니다.

보완설계가 완료되면 올해안에 국가철도공단과 위·수탁계약을 진행하고 2024년부터 공사를 추진할 예정입니다.

공사준공 시기는 현재 서울시에서 확인한 바로는 철도횡단구간(비개착) 공사는 철도가 운행하지 않는 야간(2~3시간/일)에만 작업을 할 수 있는 관계로 공사기간이 당초보다 많이 지연될 것으로 예상되나 현재로서는 정확한 시기는 특정하기 어렵습니다. 서울시에서도 공사가 최대한 빨리 진행될 수 있도록 철도공사 측과 다각도로 협의를 진행하고 금천구와 함께 적극 협조하도록 하겠습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 도시기반시설본부 시설국 방재시설부 김동민 주무관(☎ 02-6438-2431)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

주무관	김동민		방재시설부장	07/31
이동훈
협조자
시행	방재시설부-9158	(	2023. 7. 31.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 빌딩 14층	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-6438-2431	/전송	02-6438-2459	/	arikdm@seoul.go.kr	/	부분공개(5)