아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 대 공 원
수신	(주) 중앙하이츠개발 대표 정상규 귀하
(경유)
제목	서울랜드 노후 메인 급수관로 교체공사(2단계) 준공계 제출 협조

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울랜드 노후 메인 급수관로 교체공사와 관련하여 배수지 메인 급수관 연결에 대한 설계가 불분명하여『지방자치단체 공사계약 일반조건(이하 공사계약 일반조건)』제19조 제1항에 따라 2023. 8. 7.긴급공정회의를 통해 설계변경을 요구하였으나, 협의가 원활히 진행되지 않아 배수지 급수관로 연결 공정 삭제 등, 설계변경을 추진하고자 합니다.

3. 이에 따라『관련예규』제26조 제1항에 따라 공사량 감소에 따른 계약금액을 조정하고자 감설계(정산설계)관련 서류 일체를 준공기간 이전까지 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 대 공 원 장
주무관	송용현		시설과장	08/17
문석기
협조자	주무관	천미영
시행	시설과-7399	(	2023. 8. 17.	)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102, 서울대공원 관리부 시설과 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7421	/전송	02-507-7230	/	hyun1406@seoul.go.kr	/	부분공개(5)