				★ ◎
문서번호	도시기전부-1536			부원			도시기전부장			기전사업처장
보존기간	20년										04/17
				안성재			최용석			박우석
결재일자	2023.04.17.
공개여부	공개			협조	부원				신석호
일상감사	대상아님
장지동길 신설 도로개설 전기공사 관련
위례지구 택지개발사업 불법주정차단속장비 설계변경 검토 보고
		서울주택도시공사
(건설사업본부 도시기전부)

장지동길 신설 도로개설 전기공사 관련

위례지구 택지개발사업

불법주정차단속장비 설계변경 검토 보고

우리공사에서 시행중인『장지동길 신설 도로개설 전기공사』와 관련하여 장지동길 지하차도 개통에 따른 관리청 요구사항으로 위례지구 택지개발사업 내 불법주정차단속장비에 대한 설계변경을 아래와 같이 검토하고 그 결과를 보고합니다.

1		관련근거

□ 장지터널 개통 관련 불법주정차 CCTV 설치협조 요청

(송파구청 주차정책과-10311호, 2023.03.16.)

2		계약현황

(단위: 원)

계 약 명	계 약 자	계약금액	계약기간	비 고
위례신도시(3공구) 스마트시티 정보통신공사 차량번호판독기 구매	완전정보통신㈜	340,507,900	2018.03.28. ~ 2023.05.31.

3		교통안전시설물 설계세부현황

□ 지급자재 설계현황

품 명	규 격	단위	수 량			비 고
			구립송파 요양센터	한림연예 예술고등학교	계
불법주정차단속장비	불법주정차 단속	개소	1	-	1

□ 송파구청 요구사항(불법주정차 CCTV)

□ 장지동길(장지터널) 개통에 따른 교통혼잡 해소와 주민안전을 위한

불법주정차무인단속 CCTV 1개소 설치 요청

4		설계변경 내용

□ 설계변경 사유

□ 위례 택지개발사업의 광역교통개선대책으로 위례신도시와 장지동길을     연결하는데 목적으로 위례지구 택지조성사업에 포함되어 장지동길 도로개설     공사가 추진되고 있으며,

□ 민원에 따른 지하차도 임시개통(2023년 4월말) 예정으로 공사 및 자재수급의    시급성을 고려하여 위례지구 택지개발사업내 설치되는 교통안전시설물의

기구매건을 설계변경하여 동일한 제품으로 구매

□ 설계변경에 따른 수량변경

품 명	규 격	수 량			비 고
		변경전	변경후	증·감
주정차 Pole	Ø267.4 x 6t x 8m, 강관	9	10	1
단속용 카메라	200만화소, 광학37배줌, 회전형	9	10	1
주정차단속제어기	듀얼코어 3GHz, RAM 2G, HDD 1TB	9	10	1
번호인식모듈	번호 위치 인식	9	10	1
영상처리모듈	텍스트 인식 시스템	9	10	1
객체인식모듈	객체 인식 및 영상처리	9	10	1
양면LED전광판	300㎜ x 300㎜, LED 3색 모듈	9	10	1
제어함체	STS, 600㎜ x 600㎜ x 900㎜	9	10	1
장애제어관리기	5CH, TCP/IP	9	10	1
서지억제기	전원용	9	10	1
서지억제기	통신용	9	10	1
누전차단기	2P 30AF 5kA이상	9	10	1
안내표지판	설치 목적 및 장소, 촬영범위 및 시간	18	19	1
주정차 안내 계도판	단면, 알루미늄2T, 고휘도반사지	90	100	10
허브	8PORT(POE 4PORT 포함)	9	10	1
부착물방지시트	엠보시트, 빗물받이 포함	9	10	1
단속카메라 브라켓	벽부형, 기성	9	10	1

5		계약금액 변경현황 및 검토의견

□ 설계변경에 따른 계약금액 변경현황

(단위: 원)

계 약 명	계약금액		증·감	비 고
	당 초	변 경
위례신도시(3공구) 스마트시티 정보통신공사 차량번호판독기 구매	340,507,900	368,558,660	증) 28,050,760	부가세 포함

□ 검토의견

□ 장지동길 지하차도공사는 위례 택지개발사업의 광역교통개선대책의    일환으로 시행되고 있으며,

□ 장지동길 지하차도 임시개통예정에 따른 공사 및 자재수급의 시급성과    향후 관리청(송파구청)과의 인수인계 및 유지관리의 편의성을 고려하여    위례지구 택지개발사업내 설치되는 제품으로 설계변경하여 설치함이 타당함

6		행정사항

□ 본 방침 이후 계약부에 계약변경 요청.

붙임  1. 관련근거 1부

2. 설계변경내역서(위례 스마트시티 차량번호판독기) 1부.  끝.