문서번호	시설보수과-10111
결재일자	2023. 10. 18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김태윤		안종필	10/18
			윤창진
협 조
	주무관			임대석

제3처리장 A계열 지하구 소방설비 교체공사

설계변경 검토 보고

2023.  10.

중랑물재생센터

(시설보수과)

제3처리장 A계열 지하구 소방설비 교체공사

설계변경 검토 보고

「제3처리장 A계열 지하구 소방설비(자동화재탐지설비) 교체공사」와 관련, 추가 작업에 따른 설계변경(1회) 사항을 아래와 같이 보고함

*************************************************************

1		사업현황

□ 제3처리장 A계열 지하구 소방설비(자동화재탐지설비) 교체공사

o 사업기간 : '23. 6. 2. ~ 11. 30.

o 사업내용 : 3처리장 자동화재탐지설비 교체

o 계약금액 : ************

o 계 약 자 : *******************

□ 3처리장 A계열 지하구 자동화재탐지설비 교체 감리용역

o 사업기간 : '23. 6. 8. ~ 11. 30.

o 사업내용 : 3처리장 A계열 소방공사 감리

o 계약금액 : ***********

o 계 약 자 : *****************

2		변경내용

□ 변경개요

o 광센서 중계반 설치 위치 변경

- ************************************

o 지하구 내 2개소 유도등 설치(3처리장 C계열 초침, 2소화조)

-****************

□ 공사 설계변경

o 변경내용

공종	규격		단위	수량
				당초	변경	증감
광센서 중계반 설치 위치 변경	**********	*****	*	*	**	**	**
	*****	****	*	****	****	**	**
	*****	****	*	****	****	**	*
	***	***********	*	**	**	**	*
	****	*****	*	***	***	**	**
	*****	***	*	***	***	**	*
	*****	***	*	****	****	**	*
	******		*	*	*	**	*
	*******		*	*	**	**	**
	*******		**	**	***	**	***
지하구 내 유도등 설치	****	**	*	*	***	**	***
	*****	****	*	*	***	**	***
	*****	***	*	*	***	**	***
	******	*********	*	*	*	**	*

****************************************************

o 변경금액

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증·감		비 고
총공사비		***********	***********	**	**********
도급비	공급가액	***********	***********	**	**********
	부가가치세	**********	**********	**	*********
	계	***********	***********	**	**********

□ 감리용역 변경

o 변경사유 : 소방시설공사업법 제16조

- 자동화재탐지설비 개설 시 감리자 지정 의무(주 1회 이상)

- 감리계약 연장************에 따라 감리자가 주 1회 이상 배치되도록 내역 변경

o 변경내용 : 배치일수 증가(24회 → 25회)

(단위 : 원)

배치일수		계약금액
당초	변경	당초	변경	증감
********** *****	******** *****	***********	**********	**	*******

3		조치계획

○ 검토한 결과 변경내역이 적합한 것으로 검토되어 아래와 같이 변경계약 의뢰하고자 함

사 업 명	변경 전	변경 후	비 고
제3처리장 A계열 지하구 소방설비(자동화재탐지설비) 교체공사	***********	***********
제3처리장 A계열 지하구 자동화재탐지설비 교체 감리용역	***********	**********

- 예산과목 : *********************************************************************

붙임  1. 실정보고서 및 검토보고서 각 1부.

2. 변경내역서 2부.

3. 합의각서 2부.  끝.