문서번호	정수과-10791
결재일자	2023. 11. 14.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
서상훈		김민섭	11/14
			서한호
협조

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

2023.  11.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

자양취수장 조류차단막, 오일휀스 철거 설치 및 이물질 제거공사 시행중 시공물량 증감등에 따른 설계변경 사유가 발생하여 자체 설계변경 심의위원회를 개최하고 심의결과를 보고드림

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명 : 자양취수장 조류차단막‧오일휀스 철거, 설치 이물질 제거공사

ㅇ 계약업체 : 정석으뜸기술(주) 대표자 허남택, 이원혁

ㅇ 계약금액 : 62,289,300원

ㅇ 계약기간 : 2023. 5. 24. ~ 2023. 11. 19.

ㅇ 공사개요 : 조류차단막(170m), 오일휀스(220m) 철거 및 설치
취수구 스크린 주변 이물질제거 및 수초제거 20개소 720㎡
오일휀스 및 조류차단막 구매 70m

□ 심의위원회 심의결과

ㅇ 위 원 장 : 정수과장 김민섭

ㅇ 위    원 : 공업6급 김광묵 외 3명, 간사 1명

ㅇ 일    시 : 2023.11.14.(화) 09:30 ~ 10:30(2층 정수과 회의실)

ㅇ 안    건 : 자양취수장 조류차단막, 오일휀스 철거, 설치 및 이물질제거공사 설계변경 적정성 여부 및 내역 검토

ㅇ 심의결과 : 적정

□ 심의위원회 심의내용

ㅇ 시공물량 증감 적용 적정성 검토

ㅇ 제경비 산출 적용 적정성 검토

ㅇ 제경비 정산(보험료 정산 등) 적정성 검토

□ 변경 금액

(단위 : 원)

구분	금 액		증‧감	비 고
	당초	변경
공급가액	56,626,637	40,577,273	***16,049,364
부가가치세	5,662,663	4,057,727	****1,604,936
도급비	62,289,300	44,635,000	***17,654,300

□ 조치의견

ㅇ 위와 같이 시공물량 증감 및 제경비 납부 정산에 따른 감액으로 인한 설계변경 자체 심의위원회 심의결과에 따라 설계변경코자 합니다.

붙 임 : 1. 설계변경 내역서 1부.
2. 계약금액조정 검증확인서 1부.
3. 심의위원회 의견서 1부. 끝.