문서번호	계획설계과-10515
결재일자	2023. 11. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계획설계과장	급수부장
민경석		백광인	11/30
			송헌영
협조
	주무관		김다은

- 미아 배수지 건설사업 -

토지보상비 사고이월 검토 보고

2023. 11. 30. (목)

급  수  부

(계획설계과)

- 미아 배수지 건설사업 -

토지보상비 사고이월 검토 보고

급수부장 :송헌영☎3146-1401 계획설계과장 : 백광인☎1410 담당 :민경석☎1414

'미아 배수지 건설사업'의 토지보상비에 대한 사고이월 검토 보고임.

Ⅰ		사업 추진 현황

□ 사업개요

ㅇ 위치 : 강북구 미아동 산108-4, -99 (2필지, 4,914㎡)

ㅇ 사업 규모 : 배수지(5,000㎥), 송·배수관 부설(D400㎜, L=2.4㎞)

ㅇ 기간 : 2018 ~ 2026

ㅇ 총사업비 : 12,310백만원 - 공사비(10,056), 보상비(1,211), 설계비 등(1,043)

□ 추진 경위

ㅇ 미아배수지 건설공사 기본계획 용역 시행	’18. 4. ~ ’19.12.

ㅇ 도시계획시설 결정 추진(미결정)	’19.10. ~

- 관련부서 협의의견(공원조성비용 매몰, 주민민원)을 반영하여 위치 변경(체육공원→향천사)

※ 변경 위치는 북한산국립공원(행위제한)에 저촉되어 해제 필요

ㅇ 국립공원(북한산 국립공원) 해제	’19. 7. ~ ’23. 5.1.

- 국립공원 대체지 확보 및 해제 안건 제출('20.6.) 하였으나, 중앙부처간 협의 지연으로 최종 '23.5.1. 해제 고시됨(환경부).

ㅇ 도시계획시설(수도공급설비) 결정	’23. 3. ~ 7.

- 주민열람공고(’23.5.), 도시계획위원회 심의(’23.6.), 결정·고시(’23.7.20)

ㅇ 실시계획 작성	’23. 7. ~ 9.

- 주민열람공고(’23.8.), 중토위 공익성 협의(’23.9.), 결정·고시(’23.9.14.)

ㅇ 소규모재해영향평가	’23. 3. ~ 10.

- 재해영향성검토 협의완료(’23.6.), 소규모재해영향평가서 작성 완료(’23.10.)

□ 추진계획

ㅇ 토지 보상 (재무회계과)	’23.10. ~ ’24.12.

- 보상방침 수립('23.11.17.)

ㅇ 공사 시행 (시설건설과)	’25.01. ~ ’26.12.

Ⅱ		사고이월 검토

□ 예산 집행현황('23년)

ㅇ 예산과목 : 단수없는 수돗물 공급, 무단수 급수체계 구축,
미아 배수지 건설(21109), 시설비 및 부대비, 시설비

*******

*******

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

**********************

□ 이월사유 : ***********************

ㅇ ******************************************************************************************************

□ 조치계획 : 기획예산과에 사고이월 대상사업 제출.

붙임 : 토지보상 방침  1부.  끝.