문서번호	녹색에너지과-27070
결재일자	2023. 12. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에너지산업팀장	녹색에너지과장
김동일		김선례	12/05
			김재웅
협조

｢공공기관 건물일체형태양광 설치｣ 부대공사

실정보고 및 설계변경 검토 보고

2023. 12.

기후환경본부

(녹색에너지과)

｢공공기관 건물일체형태양광 설치｣ 부대공사

실정보고 및 설계변경 검토 보고

건물일체형태양광 발전시설 설치 부대공사 중 현장의 원활한 공사 추진을 위해 아래와 같이 실정보고 후 설계변경을 시행코자 함

□ 추진 근거

ㅇ 공공시설 건물일체형태양광 보급사업 추진계획(녹색에너지과-7523, ’23.3.)

ㅇ 공공기관 건물일체형태양광 부대공사 시행계획(녹색에너지과-21435, ’23.9.)

□ 사업개요

ㅇ 공 사 명 : 공공기관 건물일체형태양광 설치 부대공사

ㅇ 대    상 : 홍은119안전센터, 동작노인복지관

ㅇ 계약금액 : *********************

ㅇ 계약기간 : ***********************

ㅇ 공사업체 : ****************

ㅇ 감리업체 : ********

ㅇ 공사내용 : 가설, 금속 및 철거공사 등

□ 추진 경위

ㅇ ’23.09.25.  : 부대공사 시행계획 수립 및 계약의뢰

ㅇ ’23.10.12.  : 부대공사 계약체결

ㅇ ’23.10.13.  : 부대공사 착공

□ 실정보고 주요내용 *********

ㅇ *******************

- (당초) 비계설치 후 외벽 철거작업

- (변경) 원활한 현장 작업 진행위해 크레인 작업으로 변경, 외벽철거 중 단열재 재사용 불가로 철거․신설, 우천 대비 보양작업 실시, 해체계획서 및 안전관리계획서 미신고 대상(2010.12.이전 건물은 미해당)

ㅇ *********************

- 알루미늄 시트 물량 증가(건물구조상 BIPV패널 간격 보양필요)
해체계획서 및 안전관리계획서 미신고 대상(2010.12.이전 건물은 미해당)

□ 설계변경 내용

ㅇ 변경사항 : 물량 증감 및 신규공종 발생*********

(단위 : 천원)

구 분	공 종 명	변 경 내 용		증감
		당 초	변 경
동작노인복지관	단열재	□ 기존 단열재	□ 기존 단열재 재사용 불가, 외벽단열재 철거․신설	******
	조경공사	-	□ 크레인 작업위한 조경수 이식	******
	시스템비계	□ 외벽철거용	□ 크레인 작업으로 변경	******
	보양작업	-	□ 우천대비 보양작업	******
	해체계획서등	□ 건물해체 신고	□ 미신고 대상	****
홍은119 안전센터	폴리카보내이트	□ 시스템 비계설치 위한 철거	□ 크레인 작업으로 철거 미해당	******
	알루미늄시트	□ BIPV 간격 보수용	□ BIPV 간격 추가 보수	******
	해체계획서등	□ 건물해체 신고	□ 미신고 대상	****

□ 설계변경 금액(준공정산 포함)

(단위 : 원)

구 분		공 사 금 액			비 고
		당 초	변 경	증 · 감
총 공 사 비		***********	**********	*************
도급비	공급가액	**********	**********	*************
	부가가치세	*********	*********	*************

- 설계변경 세부 내용

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감
순 공사비	**********	**********	************
산출경비	**********	**********	************
산재·고용보험료	*********	*********	************
건강·연금·노인장기보험료	*********	*	************
퇴직공제부금비	*******	*	************
산업안전보건관리비	*********	*********	************
기타경비	*********	*********	************
일반관리비, 이윤	**********	**********	************
폐기물처리비	*********	*********	*
부가가치세	*********	*********	*************
도 급 비	***********	**********	************

□ 검토 의견

ㅇ 상기와 같이 물량변경, 신규공종 적용 및 보험료 정산 등 사항을 반영하여 설계변경을 시행하고자 함

□ 향후 일정

ㅇ ’23. 12.  : 재무과 변경계약 요청

ㅇ ’23. 12.  : 준공정산 및 준공처리

붙임 1. 감리 검토의견서 1부

2. 설계변경 내역서 1부

3. 설계변경 검증확인서 1부.  끝.