아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경(3차)의뢰 (2023년 교통신호기 신설 및 보수공사)

1. 우리사업소(기전과)에서 시행 중인 『2023년 교통신호기 신설 및 보수공사(1,2,3구역)』      관련하여 아래와 같이 설계변경을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 2023년 교통신호기 신설 및 보수공사(제1,2,3구역)

나. 공사위치: 관내

다. 공사내용

사 업 명		2023년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가)
구 역		제1구역	제2구역	제3구역
사업위치		금천구,영등포구 일부	동작구, 관악구	서초구 일부
발주금액		399,050,000원	399,050,000원	399,050,000원
계약금액		351,469,450원	355,183,340원	347,362,120원
계약업체		㈜상명전기 정찬조	㈜에코 이덕순	(주)빅파워테크 백종도
계약기간		‘23. 3.15. ~ 12.28.	‘23. 3.15. ~ 12.28.	‘23. 3.15. ~ 12.28
설계변경 금 액	당 초	572,162,450원	421,334,340원	726,734,120원
	변 경	632*********	449*********	726*********
	증·감	증 60,497,550원	증 28,501,860원	-
감 리 원		㈜문창 책임감리원 서윤기, 이상윤

라. 설계변경사유: 영등포초교 교통신호기 설치 타절 등 제5차 작업완료에 따른

시공물량 증감 반영

마. 예산과목

1) 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리,

교통신호기 신설 및 보수, 시설비

(1구역: 83,727,550원, 2구역: 28,501,860 각 증)

2) 영등포초교 교통신호기 설치공사(타절)

보행자전거과, 보행환경개선 및 자전거이용활성화, 교통약자 이동편의 증진,

어린이 안전영상정보인프라구축, 시설비(1구역 - 23,230,000원 감)

붙   임 1. 합의각서 1부.

2. 설계변경서(별도송부) 1부.

3. 설계변경검토 보고서 1부.

4. 검증확인서 각1부.  끝.

	기 전 과 장
주무관	이태근		기전과장	채충일		남부도로사업소장	12/07
代홍승용
협조자
시행	기전과-13677	(	2023. 12. 7.	)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145, 남부도로사업소 (대림동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-3284-5433	/전송	02-832-5470	/	hermen@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)