아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(도림교 장기사용 배수관 정비공사 실시설계용역)

우리사업소에서 시행중인「도림교 장기사용 배수관 정비공사 실시설계용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경(준공기한 연기) 시행하고자합니다.

가. 용 역 명: 도림교 장기사용 배수관 정비공사 실시설계용역

나. 도 급 자: ***************

다. 용역기간: 2023.9.14.~2023.12.28.

라. 변경사유: 준공기한 연기

마. 설계변경 내용

구 분	당 초	변 경	비 고
계약금액	***********	***********	변동없음
계약기간	2023.9.14.~2023.12.28.	2023.9.14.~2024.2.29.	기간연장

바. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비, 장기사용 송배수관(400mm이상) 정비

붙임 1. 준공기한 연기 보고 1부.

2. 준공연기요청 공문 및 합의각서 1부.  끝.

주무관	전소영		급수운영팀장	代전소영		급수운영과장	이용구		남부수도사업소장	12/07
김분숙
협조자	주무관	공보라		주무관	정선이
시행	급수운영과-19779	(	2023. 12. 7.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 3층	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4552	/전송	02-3146-4589	/	soyoung25@seoul.go.kr	/	부분공개(5)